문서번호	시설과-12907
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
김기봉		代최이영	12/20 代이용구
협 조
	주무관			강정구
	주무관			최성태
	주무관			정성오
	주무관			최이영

「낙산배수지 건설공사」

계약금액조정 심사 소위원회 개최 결과

2019. 12.

상수도사업본부

시설과

「낙산배수지 건설공사」

계약금액조정 심사 소위원회 개최 결과

낙산배수지 건설공사 송수관 익일 재굴착 토공 누락분 반영등 2건에 대한 계약금액조정 심사 소위원회 개최 결과를 보고 드림.

공사개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 2,300㎥증설 (기존 V=3,300㎥)

송배수관 부설 D=400mm, L=597m

❍ 계약기간 : ’17. 12. 14. ~ ’20. 05. 30 (총차)

’19. 01. 01. ~ ’19. 12. 31 (3차수 진행중)

❍ 도 급 비 : 2,095,899천원 (3차 : 971,025천원)

❍ 시 공 사 : ㈜엔씨종합건설외 1개사

❍ C M 사 : 한국종합건설외 1개사

소위원회 개최 개요

❍ 일  시 : ’19. 12. 18.(수) 16:00

❍ 기  간 : 시설안전부 회의실

❍ 위  원 : 시설과장, 시설6 홍석현, 시설6 강정구, 시설6급 최성태,

시설6급 최이영, 시설7급 정성오

❍ 안  건

1. 송수관 익일 재굴착 토공 누락분 반영

❍ 송수관 부설 계속공사로 인해 배관 연결부에 대한 익일 재굴착과 되메우기 등의 토공량이 실시설계 시 누락

- 작업일보 기준 익일 재굴착 일수 : 총 33일

- 재굴착 수량 : 총 277㎥

❍ 상수도공사 설계 일반지침서에 따르면 관로공사 시 계속공사로 인하여 익일 재 굴착되는 부분에 대하여는 가산토록 규정

- 상,하 평균길이 250mm이하 2m, 300~600mm이하 3m 적용

- 가산 적용된 토량은 순수한 기계 터파기량에 반영

2. 송수관 구간공사 홍보비 계상

❍ 송수관로 구간별 홍보비 반영 필요

- 송수관 부설구간은 협소한 주택가 이면도로의 여건으로 지역 주민 민원 발생 최소화를 위해 공사정보, 차량 우회, 등의 정보 제공을 위한 가가호호 홍보 필요

❍ 구간별 공사 진행 상황에 따라 주민 홍보 시행

- 1~6구간은 구간별 1회 홍보(총 6회)

- 그 외 구간은 1~6구간보다 공사기간이 상대적으로 더 소요되고 부대 장비 투입이 많아 주민불편이 예상되어 공사 진행 상황에 따라 수시 홍보(총4회)

※ ’19. 2. 25. 주민설명회 개최 시 주민 가가호호 홍보 건의

❍ 구간별 주민 홍보 시행 현황

1구간 ~ 6구간

계약금액 조정 근거(공사계약 일반조건 6,7절)

❍ 설계서의 내용이 불분명하거나 누락,오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

❍ 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 경우

❍ 설계변경으로 인한 계약금액 조정사유에 해당

계약금액조정 심사내용

1. 송수관 익일 재굴착 토공 누락분 반영

❍ 최종 공사비 증․감 현황 (증 3,212천원)                   (단위:원)

공종명	규 격	단위	당 초		실정보고시		변경 (최종완료)		증·감 (변경-당초)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계						*********		*********		*********
1.직접공사비						*********		*********		*********
주간공사
중복터파기 (토사)	백호0.4	㎥			***	*******	***	*******	***	*******
중복되메우기 (토사)	백호0.4+ 콤팩트	㎥			***	*********	***	*********	***	*********
2. 제잡비						*********		*********		*********

❍ 심사결과 : 적정

- 산출된 공종별 수량 및 공사비 변경분에 대해 설계변경 반영함이 타당

2. 송수관 구간공사 홍보비 반영

❍ 최종 공사비 증․감 현황 (증 781천원)                     (단위:원)

공종명	규 격	단위	당 초		실정보고시		변경 (최종완료)		증·감 (변경-당초)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계						*******		*******		*******
1.직접공사비						*******		*******		*******
공사 홍보비	40가구 이하	회			*	******	*	******	*	******
공사 홍보비	40가구 이상	회			*	*******	*	*******	*	*******
2. 제잡비						*******		*******		*******

❍ 심사결과 : 적정

- 산출된 공종별 수량 및 공사비 변경분에 대해 설계변경 반영함이 타당

2019. 12. 19.

위 검토자 : 건설공사 계약금액조정 소위원회

팀  장  :   시설과장                  송 병 욱

팀  원  :   누수방지과  지방시설주사  최 성 태

시설관리과  지방시설주사  강 정 구

공간정보과   지방시설주사  홍 석 현

시 설 과    지방시설주사  최 이 영

시 설 과  지방시설주사보  정 성 오

붙 임 : 1. 관련 실정보고 검토 및 승인 방침서 1부.

2. 건설사업관리자 계약금액조정 심사 요청 공문 1부(별첨).  끝.