설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

1. 공사명 : 2019년 강북아리수정수센터 조경관리용역

신청부서명	정수시설과
작 성 자	나도흠
제출년월일	2019. 12. 19

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2019. 12. 19(목) 17:30

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여

아래와 같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위    원

정수시설과장

백상희

12/20

백상희

타당함

위    원

주무관

김수영

김수영

타당함

위    원

주무관

임근식

임근식

타당함

위    원

주무관

양경현

양경현

타당함

위    원

주무관

함인석

함인석

타당함

담    당

주무관

나도흠

나도흠

타당함

설계변경 사유서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 강북아리수정수센터 조경관리용역

○ 공사기간 : 2019. 3. 20. ~ 12. 20

○ 도 급 비 : 당초금액 *************

변경금액 **************************

○ 도 급 자 : ㈜하늘조경 대표 양희선

□ 설계변경 사유

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령             제74조 2항 및 공사계약 일반조건 제7절 나항

○ 변경금액

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비	***********	***********	**********

□ 설계변경 내용(물량증감)

○ 잔디깎기(핸드가이드식, 승용식), 풀깎기처리운반비 물량 감소

- 사유 : 잔디 생장속도 차이로 작업 횟수 감소에 따른 풀깎기 면적 감소

○ 일반전정(낙엽수, 상록수) 물량 감소

- 사유 : 당초 예상했던 수목 생장속도의 차이로 작업 물량 감소

○ 수목 이식(R20, R25, R30) 물량 감소

- 사유 : 금년도 이식 필요 수목이 없으므로 물량 감소

□ 설계변경 내용(신규공종)

○ 꽃잔디 식재, 식생기반조성, 경계목 설치

- 사유 : 청사 미관 개선을 위한 본관 정문 2층 발코니 화단 조성

○ 황금조팝나무 식재, 비비추 식재, 옥상화분 설치

- 사유 : 청사 미관 개선을 위한 본관 후문 2층 발코니 화단 조성

○ 수목관수(B10, B10-20미만, B20-B30미만)

- 사유 : 본부 시행 2019년 강북정수센터 녹지조성 공사 식재 수목 여름철 고사 방지

○ 배롱나무 식재

- 사유 : 센터 미관 개선을 위한 잔디구장 북측 수목 식재

○ 조롱박, 여주 식재

- 사유 : 센터 미관 개선을 위한 직원 쉼터 조롱박 터널 조성

○ 고사목 및 지장목 제거(B10~B40)

- 사유 : 센터 미관 개선을 위한 고사된 수목 제거와 구내 도로 지장목 제거

○ 신규 공종 및 물량 증·감 현황

공 종	물량		증,감	비고
	당초	변경
잔디깎기(핸드가이드)	52,287㎡	43,574㎡	감8,713㎡	물량감소
잔디깎기(승용식)	97,608㎡	81,340㎡	감16,268㎡	물량감소
풀깎기처리운반비	484,499㎡	459,518㎡	감24,981㎡	물량감소
일반전정(낙엽수, 흉고11cm 미만)	52주	37주	감15주	물량감소
일반전정(낙엽수, 흉고11~21cm 미만)	162주	147주	감15주	물량감소
일반전정(낙엽수, 흉고21cm 이상)	76주	61주	감15주	물량감소
일반전정(상록수, 흉고11cm 미만)	89주	74주	감15주	물량감소
일반전정(상록수, 흉고11~21cm 미만)	287주	272주	감15주	물량감소
일반전정(상록수, 흉고21cm 이상)	117주	102주	감15주	물량감소
수목이식(R20)	7주	0주	감7주	물량감소
수목이식(R25)	3주	0주	감3주	물량감소
수목이식(R30)	2주	0주	감2주	물량감소
꽃잔디 식재	0본	1000본	증1000본	신규공종
식생기반조성	0개소	1개소	증1개소	신규공종
경계목 설치	0개소	1개소	증1개소	신규공종
황금조팝 식재	0본	240본	증240본	신규공종
비비추 식재	0본	160본	증160본	신규공종
옥상화분 설치	0개소	20개소	증20개소	신규공종

공 종	물량		증,감	비고
	당초	변경
수목 관수(B10 미만)	0주	2254주	증2254주	신규공종
수목 관수(B10-B20 미만)	0주	74주	증74주	신규공종
수목 관수(B20-B30 미만)	0주	26주	증26주	신규공종
배롱나무 식재	0주	20주	증20주	신규공종
조롱박, 여주 식재	0주	28주	증28주	신규공종
고사목 및 지장목 제거(B10)	0주	11주	증11주	신규공종
고사목 및 지장목 제거(B14)	0주	17주	증17주	신규공종
고사목 및 지장목 제거(B16)	0주	16주	증16주	신규공종
고사목 및 지장목 제거(B20)	0주	9주	증9주	신규공종
고사목 및 지장목 제거(B30)	0주	4주	증4주	신규공종
고사목 및 지장목 제거(B40)	0주	1주	증1주	신규공종

○ 건강·연금·노인장기요양보험료 정산 시행

공 종	당초	변경	증,감	비고
건강보험료	**********	**	***********	미납
연금보험료	**********	**	***********	미납
노인장기요양보험료	********	**	*********	미납
계	***********	**	************

○ 설계변경 금액(변동 있음)

(단위 : 원)

구분		금액		증,감	비고
		당초	변경
총 공 사 비		***********	***********	**********
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부가세	**********	**********	********
	계	***********	***********	**********

3		조치 계획

▢ 상기와 같이『2019년 강북아리수정수센터 조경관리용역』시행 중 발생한 물량 증감 발생에 대해 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고자 하며,

▢ 설계변경 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경을 시행하고, 계약부서에 변경계약 의뢰하여 변경계약 후 준공처리코자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.  끝.