설계변경 심의 의견서

부분공개(6)

□ 공사명: 내곡지구 이중화 배관 부설공사

신청 부서명	강남수도사업소 시설관리과
공사 감독원	지방시설주사 ***
제출 년월일	2019. 12. 19.

□ 심의 위원회 의견

○ 심의일시: 2019. 12. 19.(목) 16:00~

○ 심의의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이

의견 제시함

○ 심의의견사항 반영: 아래 “의견”란에 검토사항 작성함

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

***

12/20

정재현

적정함

위    원

시설안전팀장

***

강희창

적정함

위    원

급수운영팀장

***

代제영도

적정함

위    원

급수관리팀장

***

김진성

적정함

위    원

주무관

***

제영도

적정함

위    원

주무관

***

최지영

적정함

담    당

시설운영팀장

***

전동근

설계변경 사유서

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 내곡지구 이중화 배관부설공사

○ 공사개요: 송배수관부설 D=500㎜, L=800m

○ 공사기간: 2019. 5. 27. ~ 2019. 12. 22.

****************************************

*********************

□ 설계변경 사유 및 주요 내용

○ 관련규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법시행령 제74조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정자치부 예규 제67호(2016.10.4.)제13장 공사계약일반조건 제6절 공사설계의 변경 및 제7절 계약금액의조정

○ 공사현장 실정에 따른 변경요인

연번	구분(제목)	주요 변경내용
1회	현장실정 검토보고	- 일부구간 아스콘깨기 두께 증가
2회	현장실정 검토보고	- 제수밸브 신설 및 중간,퇴수,공기변 위치변경
3회	현장실정 검토보고	- 2구간 시점부 부단수 분기 규격 변경시공
4회	현장실정 검토보고	- 1구간 종점부 부단수 분기 규격 변경시공
5회	현장실정 검토보고	- 1구간 시점부 부단수 분기 위치변경시공

□ 변경 내용

공종	규격	단위	당초	변경	증·감
관부설	D=500㎜	m	800	874	증74

□ 설계변경으로 인한 계약금액 조정

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
도 급 비	442,753,330	462,957,000	증20,203,670
공급가액	402,503,028	420,870,000	증18,366,972
부가가치세	40,250,302	42,087,000	증1,836,698

붙임: 설계변경 내역서 등 각 1부.  끝.