문서번호	방재시설부-19306
결재일자	2019.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
김희숙		오춘섭	12/23 이임섭
협조
	주무관		손병도

『돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사』

지장물 철거완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사』

지장물 철거 완료 보고

우리 본부에서 추진 중인 「돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사」의현장내 지장물 철거가 완료되어 결과를 보고드림

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사

○ 위    치 : 종로구 송원길2 일대

○ 규    모 : 수직정원 552㎡, 옥상정원 170㎡, 가로녹지 142㎡, 온실1동 증축

○ 공 사 비 : 금1,083,287천원

(도급비 1,044,899,000원 / 관급자재비 38,388,530원)

○ 공사기간 : 2019. 11 .11. ~ 2020. 5. 8.

○ 시 공 사 : 유한회사 연일종합조경 대표 성문정 [조경공사업]

창일산업(주) 대표 이학수 [건축공사업]

강우기업(주) 대표 이준목 [금속구조물·창호·온실공사업]

○ 감독/감리 : 서울시설공단[조경]/엘림아키건축사사무소[가설·건축]

Ⅱ		보고내용

□ 현    황

○ 돈의문박물관마을 H동(1~4동) 건물 내 관계부서(주거재생과, 관광산업과 등)에서 대관 및 대실 중인 집기류 등이 존치하여 실착공을 위한 공사용지 확보가 어려워, 관계부서 회의를 통해 철거 협조를 요청하여 12.17.자로 지장물 최종 철거 완료됨

□ 지장물 철거 경위

○ 2019.11.13. : 관계부서 회의(방재시설부 주관)

- 11.20.까지 건물내 집기류 반출 협조 요청[방재시설부-16982(‘19.11.14)]

○ 2019.11.29. : 관계부서 회의(문화정책과 주관)

- 12.06.까지 미반출 집기류 철거 협조 요청[방재시설부-18086(‘19.12.03)]

○ 2019.12.09. : 공사 현장사무실 설치

- 철거가 완료된 H4동에 시공사 현장사무실 등 설치

○ 2019.12.17. : H동 전체 지장물 철거 완료

- 돈의문체험관(H1) 디오라마 시설이전을 끝으로 건물내 지장물 철거완료

□ 향후계획

○ 전체 공정에 지장이 없도록 조속한 공사 추진과 품질 및 안전  관리로 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 현황사진

H1동
H2동
	철거 전	철거 후

H4동
	1층 시공사 현장사무실	2층 감리사무실

끝.