문서번호	교량안전과-21455
결재일자	2019.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이회진		이홍재	12/23 김종호
협 조
	교량관리팀장			강천수
	교량기획팀장			박동욱

- 2019년 도림천고가 보수공사 -

설계변경 및 자문회의 개최계획 보고

2019. 12

안전총괄실

(교량안전과)

- 2019년 도림천고가 보수공사 -

설계변경 및 자문회의 개최계획 보고

『2019년 도림천고가 보수공사』설계변경 및 자문계획에 대한 보고 임

Ⅰ		관 련 근 거

□ 설계변경(1회) 및 단가적용 검토보고(감리-19-1187, ‘19. 12. 20)

□ 도림천고가 유지관리 방안 변경 보고(교량안전과-16188, ‘19.9.23)

□ 도장공사 추가에 대한 사업계획변경 검토 보고(감리-19-1187, ‘19. 12. 20)

□ 사후원가검토조건부(P.S공종)현장실사 자문회의 결과 및 조치계획          ○ 아스팔트 및 방수층제거, 바탕정리(교량안전과-20107호)

○ 강교도장 표면처리(교량안전과-20863호)

□ 지방재정 집행관련 안내(예산담당관-13298, ‘19.11.04)

○ 시설비 및 부대비에서 발생한 낙찰차액에 대하여, 동일 단위사업 내

세부 사업간 동일 편성목으로 예산변경 사용 가능

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2019년 도림천고가 보수공사

□ 공사기간 : 2019. 04. 16  ~ 2020.01.15.

□ 총사업비 : ***********

□ 공 사 비 : ***********

○ ******************************************

□ 공사내용 : 강재도장 5,288㎡, 교변방수 및 포장 15.27a 등

□ 계약상대자 : ***************

Ⅲ		설계변경 주요내용

□ 신도림역 횡단구간 강재거더 도장공사 추가

□ 공중비계 설치구간 콘크리트 표면보수 추가

□ P.S공종 실사단가 적용

○ 아스팔트 및 방수층제거, 바탕정리

○ 강재 표면처리

□ 철도운행관리자, 전기안전관리자, 철도감시원 실근무 정산 및 야간

노임 적용

□ 절연방호관 철거 제외

□ 교통통제시설 및 교통신호수, 보행안전도우미 실투입 정산

□ 국민연금보험료 등 제경비 정산

□ 한국철도공사 수탁개산금 정산

□ 신규비목 협의단가 적용(PI 제19-41호, ‘19. 12. 20)

○ 공사계약 일반조건 제20조에 의거 신규비목에 대하여 협의단가 적용

- 물량 증·감 : 계약단가 적용

- 신규비목 : 협의단가 적용

· 설계변경당시 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의

범위에서 50/100으로 협의 함

Ⅳ		설계변경 검토 결과

□ 공사비 증·감 내역

(단위 :원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
****	*************	*************	***************
*****	***********	*************	***************
*****	**********	**********	***************
*****	***********	*********	***************

□ 주요공종 물량 증·감 내역

주 요 공 종	규 격	단위	수 량				비 고
			당 초	변 경	증	감
******** ****	****************	*	*****	*****	*	*
*****	*************	**	*****	*****	*	*
************	**	**	*****	*****	*	*
*****	***************	**	***	**		***
***********	*****************	**	*****	*****		******
**********	*****************	**		*****	*****
*********** *******	*********	**	*****	*****		****
*********** ******	*********	**		*****	*****
********	**********	**		***	***
********	****************	**		*	*
*********	*************	*		**	**
*********	*************	*		**	**
*****	**	*		***	***
********	**************	*		***	***
************	**************	**		*****	*****		***
****	**************	**		*****	*****		***
****** *******	**********************	**		*****	*****		***
****** ******	**********************	**		*****	*****		***

Ⅴ		공사비 확보 방안

⇒ “19년 도림천고가 보수공사” 이전비, 관급비 잔액  및 낙찰차액 활용

⇒ “19년 영등포역고가 보수공사” 낙찰차액 활용

□ 예산배정액 : ***********

□ 변경도급비 : *************************

□ 증액 도급비 확보 방안

○ ‘19년 도림천고가 보수공사 이전비, 관급비 사용 잔액 및 낙찰차액 활용

(단위 :천원)

합 계	이전비 잔액	관급비 잔액	낙찰차액	비 고
*******	*******	******	*******

○ ‘19년 영등포역고가 보수공사 낙찰차액 활용

- 낙찰차액 ************************

- 예산과목

안전총괄실, 교량안전과, 교량관리, 고가차도 및 입체교차로 관리,

영등포역고가 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅵ		자 문 계 획

□ 자문회의 개요

○ 일    시 : **********************

○ 장    소 : 교량안전과 회의실

○ 위원구성

- 위원장 : 참석위원 중 호선

- 위  원

· 내부(4) : ******************************

· 외부(1) : ************************

- 간 사 : ***********

□ 자문내용 : 설계변경(단가산출) 적정성 등

Ⅶ		향 후 계 획

□ ‘19. 12. 24. 자문결과에 따라 설계변경 및 변경계약 의뢰

□ ‘19. 12. 26. 준 공 검 사

□ ‘19. 12. 31. 공 사 준 공

붙 임 : 1. 감리단 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 계약금액 검증 확인서 1부.

4. 설계변경 자문회의 개최 사유서 1부.