문서번호	기전과-6475
결재일자	2019.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
유정하		12/23 오준식
협 조
	주무관		이군재

『교통안전시설물 원인자 부담공사(신호)』

변경승인 요청 검토보고(왕십리역 앞)

2019. 12.

기  전  과

『교통안전시설물 원인자 부담공사(신호)』

변경승인 요청 검토보고(왕십리역 앞)

교통안전시설물 원인자 부담공사 변경승인 요청이 있어 아래와 같이 검토보고 드림.

□ 관련근거

○ 성동구청 토목과-16052(2019. 12. 19.)

- 왕십리역세권 보행환경개선 교통신호등 설치 원인자공사 변경승인 요청

○ TR-감-19069(2019. 12. 6.) -- 감리

- 왕십리역세권 보행환경개선 신호등 설치공사-실정보고 및 설계변경 서류 제출

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 왕십리역세권 보행환경 개선 교통신호등 설치공사

○ 공사내용 : 대각선 횡단보도 신설에 따른 교통안전시설물 개선 설치

○ 공사구간 : 왕십리역 앞(왕십리광장로 9 ~ 왕십리광장로 17)

○ 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2019. 12. 31.

○ 공사참여자

원 인 자	공사 참여자			비 고
	설계사	감리사	시공사
성동구청 (토목과)	㈜트래픽스	㈜트래픽스	㈜영광전설

□ 변경승인 요청 내용

○ 주요 변경내용

- 공사 중 선행 토목공정(교통섬 철거)으로 신호지주(P3) 임시 이설 반영

- 왕십리역사 지하 구조물로 인한 신호지주 설치 위치 변경 및 기초 시공          방법 변경(콘트리트 기초 → 주입식 케미컬앵커)

- 왕십리역사 지하 구조물로 인한 도로횡단 신호케이블 전선관 규격변경

(맨홀 H4 ~ H5구간,  ST 104mm 2열 → ST 54mm 4열)

- 보행신호지주(P1) 이설 → 디자인지주 교체

- 신호케이블 배관, 배선, 맨홀 및 도로굴착 등 현장 맞춰 실 시공 예정 물량 반영

********************************************

□ 검토결과

○ 현장여건에 따른 변경요청 사유가 타당하여 변경승인 하고자 함.

붙임  1. 원인자 변경승인 요청 공문 1부

2. 감리사 공문 및 기술검토의견서 1부

3. 변경 내역서 1부

4. 변경전․후 도면 1부

5. 변경 교통규제 협의 문서 1부.  끝.