시  민

문서번호	시설관리과-24168
보존기간	년
결재일자	2019.12.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	시설관리과장
박상권	12/23 변재홍
협 조

『2019년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』 설계변경 심의위원회 개최

2019. 12.

북부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최

『2019년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』시행중 신규공종 및 시공물량 증·감 사항이 발생됨에 따라 설계변경 내용을 심의코자 함.

1. 일 반 현 황

가. 공 사 명 : 2019년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

- 당 초 : D=13∼300㎜, L=1,175m

- 변 경 : D=13∼300㎜, L=1,065m(신규공종 및 계약물량 증·감)

※ 설계변경 사유서 참조

다. 계약기간 : 2019.04.15. ~ 2019.12.31.(총부기기간 : 2019.04.15.~2020.06.30.)

라. 계약금액

- 당초 : 금 614,855,240원

- 변경 : 금 614,855,240원

************************

**********

*****************************************

*************************

*************************

***************************************************

3. 심 의 내 용

○ 신규공종 및 계약물량 증·감에 대한 설계변경 사항으로 단가계약공사의 특성상 발생

가. 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

나. 계약변동(증·감) 수량 및 단가 낙찰률 적용 적정여부

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 설계변경 내역                                                      (단 위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	614,855,270	614,855,270
공급가액	558,959,337	558,959,337
부 가 세	55,895,933	55,895,933

○ 신규공종 및 시공물량 증·감에 따른 변경

가. 신규공종 발생

- ****************************

나. 공사 중 물량 증·감 사항 발생

- 물량증가 : ***********************************

- 물량감소 : ********************

5. 행 정 사 항

○ 위와 같이 설계변경 사항에 대하여 적법성 여부를 검토 및 심의하고,

○ 심의 검토결과에 의거 설계변경 반영 조치하고자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의신청서 1부.

3. 설계변경 내역서1부.  끝.