문서번호	정수시설과-13835
결재일자	2019.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		代김희수	12/23 유성종
협 조
	주무관			김희수

『2019년 일반전기설비 유지보수공사(장기계속)』

설계변경(총차_1회 및 1차_1회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『2019년 일반전기설비 유지보수공사(장기계속)』

설계변경(총차_1회 및 1차_2회) 검토 보고

장기계속 공사로 시행 중인 일반전기설비 유지보수 연간단가 공사에 대해

작업지시에 따른 시공물량 반영 및 1차 보험료 등 정산 설계변경 보고임

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2019년 일반전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 공사내용 : 염소실 냉난방 전기공사, 정수지 물청소설비 전기공사, 태양광

전기공사, 2여과지 보안등 전기공사 등

○ 계약금액 : 금261,143,000원(1차: 208,893,690원, 2차: 52,249,310원)

○ 공사기간 : *********************(1차: ’19.04.01.~12.31.)

○ 계 약 자 : 주식회사 영동테크윈 대표이사 모상신

□ 설계 변경 사유

○ 작업지시에 의한 공종별 물량 조정 및 1차 보험료 등 납부실적에 의한 정산 조정

□ 관련 근거

○ 2019년 일반전기설비 유지보수공사 작업지시(1~4회)

○ 지자체 입찰 및 계약집행 기준(제13장 공사계약일반조건, 제6절 공사설계의 변경)

□ 설계 변경

○ 공사비 변경 현황(※상세변경내용은 「설계변경내역서」 참조)

구 분	계약금액(원)				증·감 (원)
	당초		변경
총공사비	261,143,000		261,143,000		-
	1차(2019년)	2차(2020년)	1차(2019년)	2차(2020년)
재 료 비	36,831,650	10,650,743	46,672,641	10,650,743	증) 9,840,991
노 무 비	101,158,412	24,154,495	103,033,119	24,154,495	증) 1,874,707
경 비	23,711,086	5,804,768	13,143,650	5,804,768	감)10,567,436
기 타	47,192,542	11,639,304	46,044,280	11,639,304	감) 1,148,262
소 계	208,893,690	52,249,310	208,893,690	52,249,310	-

○ 보험료 등 정산 : 납부실적 없음(감, 금11,310,128원)

□ 조치 의견

○ 1차 준공기한이 도래하였고 계약자의 보험료 등 납부 실적이 없으므로 사전 정산하여 시공물량 증․감 사항에 반영코자 하며 1차 계약내역에 반영하지 못한 물량은 차년도 2차 계약내역에 반영하여 정산코자 함.

붙 임 : 1. 작업지시 내역서 1부.

2. 설계변경내역서(총차 및 1차) 각 1부.

3. 설계변경합의서 각 1부.  끝.