문서번호	정수시설과-13834
결재일자	2019.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		代김희수	12/23 유성종
협 조
	주무관			김희수

『2019년 수배전반(고압기동반)외 1종 제작구매 설치(장기계속)』

설계변경(총차_2회 및 1차_2회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『2019년 수배전반(고압기동반)외 1종 제작구매 설치(장기계속)』

설계변경(총차_2회 및 1차_2회) 검토 보고

장기계속 계약으로 시행 중인 수배전반 연간단가에 대해 납품지시 물량 반영 및 보험료 등 정산 설계변경 보고임.

		사업 개요

○ 계 약 명 : 2019년 수배전반(고압기동반)외 1종 제작구매 설치(1차)

○ 계약금액 : 금158,911,800원(총차 195,097,400원)

○ 계약기간 : 2019.03.05.~12.31.(총차, 2019.03.05.~2020.03.31.)

○ 계 약 자 : ****************

		설계변경 사유

○ 수배전(고압기동)반 운용중에 발생한 고장수리 및 사고예방을 위한 물품 수량

변경 및 신규 품목 조정 반영 및 보험료 등 정산 설계변경

		관련 근거

○ 2~3차 분할납품 지시〔2019년 수배전반(고압기동반)외 1종 제작구매 설치〕

○ 지자체 입찰 및 계약집행 기준(제15장 물품계약일반조건 제6절 수량조절 등)

		설계 변경

○ 물품계약 변경 현황

구 분	계약금액(원)				증·감 (원)
	당 초		변 경
총사업비	195,097,400		195,097,400		-
	1차(2019년)	2차(2020년)	1차(2019년)	2차(2020년)
재 료 비	89,800,590	18,667,618	82,035,449	22,241,232	감) 4,191,527
노 무 비	28,599,296	8,126,022	28,658,963	11,569,951	증) 3,503,596
경 비	9,621,418	2,489,668	5,653,579	6,631,292	증) 173,785
기 타	30,890,496	6,902,292	28,191,509	10,115,425	증) 514,146
소 계	158,911,800	36,185,600	144,539,500	50,557,900	-

○ 보험료 등 일괄 정산 : 보험료 등 1차 반영 내역을 2차 계약으로 일괄 조정하여   총차 계약기한 내 보험료 등 납부실적을 제출받아 정산

		조치 의견

○ 상기와 같이 2~3차 분할납품 수량을 반영하여 물품수량변경 및 신규 품목에 대해 붙임과 같이 설계변경하고자 하며 보험료 등 정산대상 항목에 대해 1차 반영된 내역을 2차로 일괄 조정하여 총차 계약기한 내 보험료 등 납부실적을 제출받아 정산하고자 함

붙 임 : 1. 납품물량내역서 1부.

2. 설계변경내역서(총차 및 1차) 각 1부.

3. 변경계약합의서 각 1부.  끝.