투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(준공기한 연기 조치 알림)

1. 업무지시현장 : 동부간선도로확장(1,2공구) 통신공사 (주)퓨젼아이앤씨, 동부간선도로

확장(1,2공구) 통신공사 주식회사 이산

2. 작 성 일 자 : 2019-12-23 09:12:21

3. 지 시 내 용

가. 공기연장 검토보고(동부2감-19-493호, 2019.12.02.)와 관련입니다.

나.「동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사」 준공기한 연기 요청에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기조치하였으니 공사장 공정관리 및 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

〇 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	`08.12.24.~`19.12.31.	`08.12.24.~`20.12.31.	증) 365일
5 차	`19.05.15.~`19.12.31.	`19.05.15.~`20.12.31.	증) 365일

끝.

주무관							김수진			시책사업과장					12/23 이종근
협조자
시행			설비부-21339									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8646						/전송			02-3708-8659					/	tnwls0169@seoul.go.kr												/	대시민공개