＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(1회) 시행[2019년 일반 전기설비 유지보수공사]

우리 정수센터에서 연간 단가계약으로 시행 중인 『2019년 일반 전기설비 유지보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명: 2019년 일반 전기설비 유지보수공사(장기계속)

나. 공사기간: 2019. 04. 01. ~ 2020. 03. 31.(1차: 2019.04.01.~12.31.)

다. 계약금액: 금261,143,000원(1차: 금208,893,690원, 2차: 금52,249,310원)

라. 도 급 자: (주)영동테크윈  대표이사  모상신

마. 하자기간: 준공검사일부터 1년

바. 변경사유: 작업지시에 따른 공사 시공물량 반영 및 보험료 등 정산

사. 설계변경 내역(도급비)(※ 원인행위 금액 계수조정을 위한 1차수 세항별 당초금액 일부 조정)

【단위: 원】

구 분		당 초		변 경		증 · 감
도급비	총공사비	261,143,000		261,143,000		-
	소 계	1차(2019년)	2차(2020년)	1차(2019년)	2차(2020년)
		208,893,690	52,249,310	208,893,690	52,249,310	-
	취수비 (711)	47,908,360	18,525,250	48,045,6900	18,525,250	-
	정수비 (712)	160,985,330	33,724,060	160,848,000	33,724,060	-

아. 예산과목: 1차(2019년)

원수및취수비(711), 수선유지교체비(214), 수선유지비(05), 정수장 시설 유지보수(11202)

☞ 전기설비유지관리 (추산) 48,045,690원

정수비(712), 수선유지교체비(214), 수선유지비(05), 정수장 시설 유지보수(11202)

☞ 전기설비유지관리 (추산) 160,848,000원

붙임: 1) 설계변경 내역서 각 1부, 2) 설계변경 합의서 각 1부, 3) 설계변경 검토보고서 1부.  끝.

주무관	박희정		정수시설과장	代김희수		암사아리수정수센터소장	12/23 유성종
협조자	주무관	김희수		주무관	변민용
시행	정수시설과-13845	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	pakei27@seoul.go.kr	/	부분공개(5)