행복한 변화, 사람 사는 동작
		동작구
수신		내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행[2019년 그린파킹 담장허물기공사(연간단가)]

우리 구에서 시행중인 『2019년 그린파킹 담장허물기공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 그린파킹 담장허물기공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2019. 3. 12. ~ 12. 31.

다. 도 급 자 : (주)현창산업 대표 김갑동

라. 예산과목 : 주차관리과, 교통질서 기반조성, 주차장 확충(주차장특별회계),

그린파킹사업(시비보조), 시설비및부대비, 시설비

- ‘담장허물기 사업’ 예산액 : 270,000천원(시 162,000, 구 108,000)

- ‘자투리땅 주차장 조성’ 예산액 : 6,000천원(시 3,600, 구 2,400)

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	변 경 내 용				비 고
	당 초	변 경	증·감
도 급 비	166,441,980	142,813,000	감)	23,628,980
공급가액	151,310,891	129,830,000	감)	21,480,891
부가가치세	15,131,089	12,983,000	감)	2,148,089

붙임  1. 설계변경사유서 1부.
2. 변경내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.

주무관	김판곤		주차기획팀장	김기택		주차관리과장	김필순		건설교통국장 직무대리	12/23 심형보
협조자	계약팀장	유진숙		재무과장	전제선		기획재정국장	민영기
시행	주차관리과-41688	(		)	접수		(		)
우	06928	서울특별시 동작구 장승배기로 161(노량진동)	/	www.dongjak.go.kr
전화	02-820-9261	/전송	02-820-9982	/	kbdeug@dongjak.go.kr	/	대시민공개