문서번호	정수시설과-12341
결재일자	2019.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
반건모		유영춘	12/23 代이상봉
협 조
	주무관			강병훈

2019년 사업소 계약심사 이행실태 순회점검 결과에 따른 조치계획 보고

2019. 12.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 사업소 계약심사 이행실태 순회점검 결과에 따른 조치계획 보고

2019년 사업소 계약심사 이행실태 순회점검 결과에 따른 지적사항에 대해 직원교육을 실시하여 향후 동일한 사항이 재발하는 것을 방지하고, 과지급 된 금액은 환수조치 하고자 함.

※관련문서 : 2019년 사업소 계약심사 이행실태 순회점검 결과 알림[상수도사업본부 안전총괄과-12301(2019.12.13.)호]

Ⅰ. 점검현황

점검개요

기    간 : 2019.11.27.(수) ~ 2019.11.28.(목)

장    소 : 영등포아리수정수센터 관리본관 2층 회의실

점검대상 : 2018~2019년도 시행 사업에 대한 계약심사 분야

(발주, 계약, 설계변경 및 준공 등).

주요 점검내용

설계심사 및 계약금액조정 결과 반영 및 이행 실태

설계변경 시 신규 단가 낙찰가 적용, 수량 적정성 적용 여부

설계변경 시 계약된 제비율(일반관리비, 이윤 등) 검증 프로그램 이행여부.

Ⅱ. 점검결과

계약금액조정 점검결과

환수조치 1건, 정산 조치 1건, 현장 시정교육 2건.

구 분	계		환수 조치		정산 조치		현장 시정교육
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
건/천원	4	13,472	1	8,357	1	5,115	2	-

지적사항

견적단가 제경비, 신규단가 품셈, 기계장비 효율, 전동구동장치 철거품 적용 부적정 등.

연번	건 명	공사금액(기간)	점검 결과	조치 사항
1	2018년 영등포아리수정수센터 토목건축 시설물정비공사	203,181천원 (18.4.20. ~ 19.4.15.)	○ 견적단가 제경비 적용 부적정 ▸ 일반관리비, 이윤 중복 적용	환수 조치 (8,357천원)
			○ 신규단가 품셈 적용 부적정 ▸ 타일붙이기 규격 착오	점검 시 시정교육 완료
2	2019년 영등포아리수정수센터 건축토목 시설물정비공사	197,909천원 (19.4.24. ~ 20.4.30.)	○ 기계장비(굴삭기) 효율 적용 부적정 ▸ E값 0.3 → 0.65	설계변경 시행 감 조치 (5,115천원)
3	1정수지 유출밸브 전동구동장치 제작구매설치	21,920천원 (19.3.5. ~ 19.4.4.)	○ 전동구동장치 철거품 적용 부적정 ▸철거품 설치품 × 60% → 40% ※ 2019년 기전분야 품셈단가 참고	점검 시 시정교육 완료

Ⅲ. 조치계획

환수계획

대    상 : ****************

공 사 명 : 2018년 영등포아리수정수센터 토목건축시설물 정비공사

지적내용 : 견적단가 제경비 적용 부적정(일반관리비, 이윤 중복적용)

환수금액 : 8,357천원

환수금액에 대하여 상수도사업본부에 고지서 발급요청

계약업체에 내용 통보 후 환수예정.

설계변경 시행(감 조치)

대    상 : ****************

공 사 명 : 2019년 영등포아리수정수센터 건축토목시설물 정비공사

지적내용 : 잔토소운반 기계장비(굴삭기) 효율적용 부적정 (E값 0.3 → 0.65)

감    액 : 5,115천원

2019년 설계변경(2차)에 반영 완료.[설계변경(2차) 시행, 정수시설과-12190(2019.12.19.)호]

품셈단가 적용 교육

타일붙이기, 전동구동장치 철거 품셈단가 적용에 대하여 점검 시 현장시정교육을 받았으며 점검 후 자체적으로 직원교육 실시완료.

Ⅳ. 행정사항

추진일정

2019. 12. : 대상업체에 환수내용 통보 및 납부독려

2020. 01. : 과지급금 환수 및 결과보고(상수도사업본부).

붙임 : 2019년도 사업소 계약심사 이행실태 순회점검 관련 공문 각 1부.  끝.