＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	(주)수인엔지니어링 대표 이호성 귀하
(경유)	현장대리인
제목	준공기한 지연에 대한 공정안내 및 숏크리트 검토결과 회신

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 공사중인 「서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」와 관련 준공기한(2019. 12. 20.) 지연으로 인해 계약자, 계약상대자 피해 및 공사주변 아파트입주민으로부터 민원이 발생하고 있습니다. 피해를 최소화 할 수 있도록 적극적으로 공사시공을 진행 해주시기 바랍니다.

3. 또한, 수인제2019-1218-2(2019.12.18.)호로 제출하신 숏크리트 공정에 대한 검토결과를 회신하오니 이견이 없는 경우 추후 설계변경시 반영할 예정이며 이견이 있는 경우 근거자료(참고: 품셈에 의해 단가산출 가능한 부분은 견적서 불인정)와 함께 2019. 12. 30.(월)까지 회신해 주시기 바랍니다.

※ 행정지원과-27784(2019.12.23.)호로 안내한 락볼트 인발시험은 실시하지 않으므로 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 품셈기준(숏크리트+면고르기) 설계내역서 1부.

2. 근거자료(숏크리트, 레미콘, 급결재) 각1부.  끝.

	서부수도사업소장
★주무관	방만천		행정관리팀장	엄태현		행정지원과장	12/24 代엄태현
협조자
시행	행정지원과-28009	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)