문서번호	시설관리과-26900
결재일자	2019.12.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
구본천		代최경서	12/24 고신석
협조

설계변경 심의결과 및 변경 시행 보고

(2019년 영등포구 관내 상수도공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

시설관리과

명에 의거「2019년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)」에 대하여 설계변경(2회) 심의위원회를 개최하고 심의결과에 의거 아래와 같이 설계변경 시행하고자 보고합니다.

2019. 12.   .

보고자: 지방시설주사보 구본천

□ 심의대상

◦ 공 사 명 : 2019년 영등포구관내상수도공사(장기계속단가)-2회설계변경

◦ 공사내용 : D=13 ~ 300㎜, L=1,176m

◦ 공사기간 : 2019. 4. 3. ~ 2020. 6. 30.

◦ 수 급 자 : (주)개벽  대표 주우형

◦ 도 급 비 : 662,904,210원

□ 심의일시 및 장소

◦ 2019. 12. 24(화) 13:30 2층 시설관리과 사무실

□ 심의내용

◦ 설계변경의 타당성

◦ 신규공종 단가 및 계약물량 증․감 적용 적정여부

- 신규공종 발생  : 고압블록포장걷기면적10㎡이상,지장물5%미만,야간 등 86개 공종

- 계약물량 증.감 : 아스팔트포장절단 200㎜이하 등 349개 공종

◦ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

□ 심의결과

◦ 계약변경 타당

◦ 주요 공종 변경사항 타당

◦ 세부공종 조정내역 타당

◦ 제경비 적용 타당

□ 설계변경

◦ 위 공사 시행중 현장여건 변화에 따라 신규공종 및 계약물량 증․감 발생

- 신규공종 발생  : 고압블록포장걷기면적10㎡이상,지장물5%미만,야간 등 86개 공종

- 계약물량 증.감 : 아스팔트포장절단 200㎜이하 등 349개 공종

※ 누수방지과-7295(2019.7.2.) : 녹에 취약한 노후 상수도관 추가 정비계획

□ 설계변경 및 차수별 계약금액 변경

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	662,904,210원	1,352,043,000원	증689,138,790
1차수	464,032,947원	794,043,000원	증330,010,053
2차수	198,871,263원	558,000,000원	증359,128,737

□ 조치의견

◦ 심사결과에 의거 설계변경 시행코자 하며 공사준공에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 사전심의요청서 및 의결서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율검증 1부.  끝.