투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	설계변경 시행(정산)-공공건축물 LED조명기구 교체공사(남산공원)

1. 시설과-5781(2019.12.24)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인「공공건축물 LED조명기구 교체공사(남산공원)」의 설계변경을

다음과 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 공공건축물 LED조명기구 교체공사(남산공원)

나. 공사기간 : 2019. 12. 6. ~ 2019. 12. 25.

다. 도 급 자 : **************

라. 설계변경 사유 : 현장 여건을 반영한 시공수량 변경, 신규공정 반영 및 보험료

미집행 경비 정산 등

마. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		설계변경금액			비고
		당 초	변 경	증·감
도급비	공급가액	43,261,819	36,272,728	감) 6,989,091
	부가가치세	4,326,181	3,627,272	감) 698,909
	계	47,588,000	39,900,000	감) 7,688,000

바. 예산과목 : ************************************

******************************

***********************

붙임 1. 설계변경 시행보고 1부.

2. 설계내역서 및 검증확인서 각 1부.

3. 설계변경사유서 및 설계변경 합의각서 각 1부.  끝.

	시설과장
기전팀장	김석광		시설과장	12/24 김재균
협조자	재무팀장	박태경
시행	시설과-5788	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관 (예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5971	/전송	02-3783-5969	/	ksk2050@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)