문서번호	방재시설부-19396
결재일자	2019.12.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
송석범		代정영미	12/24 이임섭
협조
	치수시설과장		조성만

- 반포천유역 분리터널 건설공사 -

유출부 BOX구간  목재데크 계단 설치 실정보고 검토결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 반포천유역 분리터널 건설공사 -

유출부 BOX구간  목재데크 계단 설치 실정보고 검토결과

「반포천 유역 분리터널 건설공사」중 유출부BOX 구간에 서리풀

공원에서 미도아파트로 연결된 진입로(콘크리트 계단)의 시설 정비    민원에 따른 목재데크 계단 설치를 공사에 반영한 실정 검토 보고임.

※ 관련공문 : 유출부BOX구간 목재데크 계단 설치 실정보고 승인요청(반포사관 2019-530/2019.12.16)

공사개요

○ 공 사 명 : 반포천유역 분리터널 건설공사

○ 사업기간 : 2018.02.01. ~ 2021.01.30.

○ 규    모 : 유역 분리 터널건설(4.5×4.5m~D7.1, 연장 1,162m)

○ 공 사 비 : 37,611백만원(조경 144백만원)

○ 시 공 사 : ㈜호반산업 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

감리단 실정내용 및 검토의견

○ 목재계단 설치 사유

- 서리풀공원에서 미도아파트를 연결하는 기존 콘크리트계단의 상태         불량 및 규격이 불규칙으로 시설 정비 민원이 있어 일정한 규격의         친환경적인 목재계단을 설치하여 이용자의 안전 및 편의를 도모하며         민원을 해소 하고자 함.

- 기존 서리풀공원 통행로가 공사와 저촉되어 폐쇄하는 공사기간동안         미도아파트 진입계단(콘크리트)을 이용하여야하는 실정임.

○ 목재계단 설치 위치도

○ 관련근거

- 물재생계획과-12382(2019.09.10.)호 : 부서회의 및 주민면담 보고

▸ 기존 진입로 콘크리트 계단 상태, 규격 불량으로 민원이 발생하여 설계             기준에 따라 시설 정비

- 방재시설부-18802(2019.12.13.)호 : 진입계단 설치에 따른 민원답변 통보

▸ 계단 난간에 핸드레일 설치하여 노약자가 안전하게 이용할 수 있도록 조치

▸ 계단 발판 가장자리에 야광형 논슬립을 설치하여 야간 이용성 제고 조치

- 실정보고 내용

구 분	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
- 조경공사 시설물
목재계단(L=53.2m)	㎡	-	201	증201
목재난간 설치(H1200)	경간	-	86	증86
목재면 도장	㎡	-	201	증201
핸드레일 설치(W1800×H125)	m	-	86	증86
논슬립 설치(야광형, 설치도)	m	-	164	증164
야자매트 설치(1000×1000×t35)	㎡	-	60	증60
기존난간 철거	톤	-	0.6	증0.6
고재처리비	톤	-	0.6	증0.6
관급자재
목재판재(1800×90×21mm, 말라스)	㎡	-	211	증211

○ 감리단 의견

- 서리풀공원에서 미도아파트를 연결하는 기존 콘크리트계단의 시설         정비 민원사항으로 목재데크 계단을 설치하여 이용자 편의를 제공         하고 민원을 해소함이 타당하다고 판단되며,

- 추후 설계변경 소위원회를 걸쳐 설계변경시 반영하고자 함.

개략공사비 내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
직접공사비	-	105,899	105,899
제요율적용제외	-	-	-
제 경 비	-	23,121	23,121
공급가액	-	129,020	129,020
부가가치세	-	12,902	12,902
도 급 액	-	124,922	124,922
관급자재비	-	9,334	9,334
총 공 사 비	-	151,256	151,256

검토결과

○ 공사장 가림막 펜스 설치로 서리풀 통행로가 폐쇄되어 공사기간        동안 미도아파트 진입 계단(콘크리트 계단)을 이용하여야 되나        이용시 안전사고 우려가 있으며,

○ “반포천 유역분리터널 공사 부서 회의 및 주민면담 결과”에 의해         진입로 콘크리트 계단 상태, 규격 불량으로 설치기준에 따라          시설물을 정비하여 이용 시민의 안전성을 확보하고자 함.

※ 관련근거 : 부서회의 및 주민면담 보고/물재생계획과-12382(2019.09.10.)호

○ 계단 난간에 핸드레일 및 계단발판 가장자리에 야광형 논슬립         설치 민원요구 사항 있어 시민들이 이용에 편리하도록 공사에         반영 함.

※ 관련근거 : 진입계단 설치에 따른 민원답변/방재시설부-18802(2019.12.13.)호

○ 실정보고 사항을 승인처리 하며 추후 설계변경소위원회를 개최        하여 결정된 사항에 대하여 설계변경 시 정산․반영할 수 있도록        책임건설사업 관리기술자에게 통보 하고자 함.

붙임 : 1. 유출부BOX 구간 목재데크 계단 설치 실정보고 승인요청 1부.

2. 진입계단 설치에 따른 민원 답변 통보 1부. 끝.