설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

□ 용역명: 2019년 서초구 관내 송배수관 정비공사등 건설폐기물 처리용역(연간단가계약)

신청 부서명	강남수도사업소 시설관리과
용역 감독원	지방시설주사보 모규환
제출 년월일	2019. 12. 24.

□ 심의 위원회 의견

○ 심의일시: 2019. 12. 24(화) 16:00~

○ 심의의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이

의견 제시함

○ 심의의견사항 반영: 아래 “의견”란에 검토사항 작성함

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

정재현

12/24

代전동근

적정함

위    원

급수운영팀장

이승우

이승우

적정함

위    원

급수관리팀장

김진성

김진성

적정함

위    원

시설운영팀장

전동근

전동근

적정함

위    원

시설안전팀장

강희창

강희창

적정함

위    원

주무관

제영도

제영도

적정함

담    당

주무관

모규환

모규환

설계변경 사유서

□ 용역현황

❍ 용 역 명 : 2019년 서초구 관내 송배수관 정비공사 등 건설폐기물 처리용역(연간단가계약)

❍ 용역개요 : 당초 – 건설폐기물 처리 4,035톤

변경 – 건설폐기물 처리 3,777톤

❍ 용역기간 : 2019.05.24 ~ 2019.12.31.

❍ 계약금액 : ***************

❍ 계약업체 : **********

□ 설계변경 사유 및 주요 내용

❍ 설계변경 사유

- 각 공사의 현장여건 변동에 따른 공종별 계약물량 증․감 사항 발생

❍ 주요 세부내용

- 운반 : 당초 1,717㎥ → 변경 1,608㎥

- 처리 : 당초 4,305톤 → 변경 3,777톤

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		당초 금액	변경 금액	증 ․ 감
총 용 역 비		***********	***********	***********
도급비	공 급 가 액	***********	***********	***********
	부가가치세	**********	**********	***********
	계	***********	***********	***********

붙임: 설계변경 내역서 등 각 1부.  끝.