문서번호	기전설비과-12655
결재일자	2019.12.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산관리과장
임은비		조성태	대결 12/26 신근호
협 조
	기획예산과장			박재희
	재무회계과장			代서미희
	주무관			문정주

- 수유6배수지 건설공사 (전기공사) -

준공검사 결과 및 준공정산 보고

2019. 12.

생   산   부

【기전설비과】

- 수유6배수지 건설공사 (전기공사) -

준공검사 결과 및 준공정산 보고

수유6배수시 건설공사(전기공사 2차분)과 관련 감리단에서 준공검사 결과 및 준공정산이 접수되어 검토결과를 보고함.

Ⅰ				관 련 근 거

❍ 준공정산 서류제출 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-378호(‘19.12.23.)

❍ 준공검사 결과보고 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-385호(‘19.12.24.)

Ⅱ				사 업 개 요

❍ 공 사 명 : 수유6배수지 건설공사(전기공사)

❍ 공사개요 : 배수지 증설공사(증3,100㎥)에 따른 부대 전기설비 공사

❍ 시공업체 : 지웅전설(대표 한재연)

❍ 감리회사 : 한국종합기술(책임건설사업관리기술자 최형출, 전기 전유택)

❍ 공사기간 및 계약금액

구 분	공사기간	계약금액(원)
총차분	‘18.07.05.~’20.05.30.	119,106,660
2차분	‘19.01.01.~’19.12.31.	100,340,000

Ⅲ				준공검사 결과

❍ 준공기한 : ‘19. 12. 31.

❍ 준 공 일 : ‘19. 12. 23.

❍ 준공검사 : ‘19. 12. 23.

❍ 준공검사자 : 기술지원기술자(전기) 곽정현

❍ 준공입회자 : 책임사업관리자 최형출, 공사관리관 임은비, 현장대리인 한재연

❍ 준공검사 결과 : 현장변환기반 미시공물량 감정산 후 공사 준공처리

Ⅳ				준공금액 정산

❍ 계약금액 변경(감 : 2,500,000원)

(단위 : 원)

구 분	도 급 비		증·감
	당 초	변 경
총차분	119,106,660	116,606,660	감)2,500,000
2차분	100,340,000	97,840,000	감)2,500,000

❍ 준공정산 사유

공 종	변경내용	비 고
다. 계측제어 설비공사	1) 현장변환기반 설치 물량 변경 (3개→0개) ▶ 사유 : 북부수도 요청사항으로 현장변환기반 저압반(LV-1)내 포함으로 설치물량 감	관련문서 : 북부수도-18252호(‘19.09.26)

- 계약금액조정검증시스템 : 제비율검증완료(붙임참조)

- 준공내역서 및 정산합의서(붙임참조)

Ⅴ				행 정 사 항

❍ 상기 보고 내용과 같이 계약금액을 재무회계과에 변경요청하고, 준공검사 결과에 의거 준공처리함.

붙임 1. 전기공사 준공정산 보고(감리단) 1부.

2. 합의서 1부

3. 준공내역서(총차분, 2차분) 1식

4. 제비율 검증결과(총차분, 2차분) 1식.

5. 준공검사 결과보고(감리단) 1부.  끝.