문서번호	설비부-21565
결재일자	2019.12.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
박경철		여인웅	전결 12/27 임정규
협조

‘남부도로사업소 청사 신축 기계설비공사(총차/2차)’

설계변경 검토보고(최종)

2019. 12.

도시기반시설본부

설비부

‘남부도로사업소 청사 신축 기계공사(총차/2차)’

설계변경 검토보고(최종)

우리 본부에서 추진 중인 ‘남부도로사업소 청사 신축 기계설비공사’ 관련, 책임건설사업관리기술자로부터 제출된 설계변경 요청사항에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 남부도로사업소 청사 신축 기계설비공사

❍ 공사위치 : 서울시 금천구 시흥3동 963-1 외 13필지

❍ 공사기간 : (총차) `17.11.17. ~ `19.12.31. (2차) `19.01.09. ~ `19.12.31.

❍ 공사규모 : 지하1층/지상5층(연면적 5,361㎡)

❍ 도 급 비 : ***************************

❍ 시 공 사 : **************

❍ 감 리 사 : ************외 1개사

2		관련근거

❍ 설계변경 검토보고 : ㈜ 삼우공간 제2019-763(‘19.12.27.)호

❍ 실외기 설치 위치변경 ***********************************

3		검토내용

❍ 설계변경 사유

- *****************************

❍ 주요 설계변경 현황

- 실외기 위치변경

구 분	당 초	변 경
지상 1층

- 주요 설계변경 내용

공 종 별	설계변경 내용	변경 전 금액	증 감 액	비고
		변경 후 금액
가스 배관	- 가스폴리에틸렌(PEM) 9m 증가 가스용백강관 46m 증가	**********	*********	적정
		**********
냉동기 배관	- 공조기 및 냉난방기(GHP) 실외기 패드 신설 (6,700×1,500×300) 1개소 - 냉동기 및 냉난방기(EHP) 실외기 패드 신설 (3,600×2,600×300) 1개소 - 냉매배관 332m 및 전선관 166m 추가	*	*********	적정
		*********
합 계	직접공사비		**********

- 설계변경 금액

① 2차 금액                                                         (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증/감	비 고
직접공사비	*************	*************	*************
간접공사비	***********	***********	*************
합 계	*************	*************	*************

② 총차 금액                                                      (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증/감	비 고
총 차	*************	*************	************
1 차	*********	*********	*	기 준공
2차(금차)	*************	*************	************

❍ 책임건설사업관리단 검토의견

-「****************************************         **********************************************       ******** *************************************       ******** **************************

4		보고자 의견

❍ ***********************를 위한  책임건설사업관리단의       검토보고  내용이 적정하다고 판단되므로,

❍ 설계변경 내용을 계약부서(총무부)에 통보하여 설계변경 조치코자 함.