투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	「어린이놀이터 미끄럼틀 정비공사」설계변경 시행

1. 조경과-8488(2019.12.26.)호와 관련입니다.

2.「어린이놀이터 미끄럼틀 정비공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 계약현황

1) 공 사 명 : 어린이놀이터 미끄럼틀 정비공사

2) 공사개요 : 미끄럼틀 철거 및 설치 등

3) 공사기간 : 2019. 12. 9. ~ 2020. 1. 6.

4) 계 약 자 : 보람개발 대표 이옥희

5) 계약금액 : 금31,444,000원(금삼천일백사십사만사천원)

나. 설계변경 사유 및 내용

1) 변경사유 : 현장여건에 따른 물량 변동, 공사 일시정지에 따른 기간연장 등

2) 변경내용

- 계약금액 : 금액 변동(증·감) 없음

- 공사기간

·당 초 : 2019. 12. 9. ~ 2020. 1. 6.

·변 경 : 2019. 12. 9. ~ 2020. 2. 17. (공사일시정지 : 2020. 1. 6. ~ 2. 5.)

다. 예산과목 : 서울대공원 조경과, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 조경시설물 설치 및 정비, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

주무관							곽연희			주무관					김흔진					조경과장					12/27 代김흔진
협조자				주무관						정한성					총무과장							유연호
시행			조경과-8495									(						)		접수											(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102															/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		02-500-7522						/전송			02-500-7993					/	kyh8917@seoul.go.kr												/	부분공개(5)