＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신자	무악청구1차아파트 입주자대표회의회장 및 관리소장
(경유)	각동별 동대표
제 목	비탈면 보강공사에 따른 사유지 사용(점용) 협약관련 협조요청

1. 귀 아파트 단지의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」와 관련 사유지 사용(점용)협약 체결(2019.4.22.) 후 2019년 10월 14일부터 12월 20일까지 준공을 목표로 공사시행하였으나, 공사현장의 열악함과 안전시공을 위한 보강방법이 추가되어 부득이 2020년 1월 11일까지 공사기간이 필요하게 되어 사유지 사용(점용) 협약기간을 아래와 같이 연장요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 무악청구1차아파트 입주민의 불편함을 최소화하도록 공사공정관리 및 공사기간을 앞당길수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

가. 사유지 사용(점용) 기한

- 당초: 2019. 12.20.

- 변경: 2020. 01.11.

붙임  사유지 사용(점용)협약서 추신 1부.  끝.

	서부수도사업소장
★주무관	방만천		행정관리팀장	엄태현		행정지원과장	12/27 代엄태현
협조자
시행	행정지원과-28314	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)