문서번호	운영과-8808
결재일자	2019.12.24.
공개여부	부분공개(6 7)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
신정현	代이도훈	12/24 代김광석

중랑물재생센터 건조시설(증설) 관리대행 용역

계약 및 협약 변경계획

2019. 12.

중랑물재생센터

(운영과)

중랑물재생센터 건조시설(증설) 관리대행 용역

계약 및 협약 변경계획

중랑물재생센터 건조시설(증설) 설치공사 준공에 따라 관리대행 용역 계약 및 협약을 변경 시행하고자 함.

※ ***********************************

**************************************************

추진 근거

❍ 관리대행 용역 협약서 제4조(관리대행기간 및 협약변경) 제1항 및 제3항

❍ 슬러지 건조시설 설치공사 준공에 따른 시설운영 요청(시설보수과-7167호, ‘19.12.23.)

	<용역 협약서〉
제4조(관리대행기간 및 협약변경) ① 이 협약에 의한 사업의 관리대행기간은 2019년 9월 1일부터 2020년 12월 31일까지로 한다. 다만, 관리대행시설의 준공 및 인수 지연 시에는 관리대행기간은 인수시점으로부터 시작하며, 이 경우 지연된 기간에 대하여는 관리대행비를 지급하지 아니 한다. ③ 서울시 방침, 제도변경 등으로 중랑물재생센터의 공단 전환 등 특별한 사유가 발생하였거나 관리대행시설의 준공일정에 따라 관리대행기간이 변경될 수 있다.

사업 개요

❍ 사 업 명 : 중랑물재생센터 건조시설(증설) 관리대행 용역

❍ 대행기간 : 2019.9.1. ~ 2020.12.31.

❍ 대행시설 : 슬러지 건조시설(증설)

❍ 대행업체 : ㈜대양엔바이오

계약현황

계약일자	계약내용	계약금액(천 원)	비 고
‘19.9.1.	최초 계약	******* **************	비정산비

계약 및 협약 변경

❍ 변경사유 : 건조시설(증설) 설치공사 준공 지연에 따른 계약 및 협약 변경

❍ 변경내용

【관리대행기간 변경 및 관리대행비용 감액】

(단위 : 원)

구 분				변경 전(현행)	변경 후	감 액	비고
관리대행기 간		제4조 제1항		‘19.9.1. ~ ‘20.12.31.	‘19.12.21. ~ ‘20.12.31.
관리대행비용	계약서	****		***********	**********	***********
		*****		*************	*************	***********
	협약서	********		***********	**********	***********
		****** **********	*****	***********	**********	***********
			*******	*********	*******	*********
			******	*********	*******	*********
			*******	**********	*********	**********
			****	**********	*********	**********
			*******	**********	*********	**********
			*	***********	**********	***********

【협약서 문구 수정】

현 행	변 경
제4조(관리대행기간 및 협약변경) ① 이 협약에 의한 사업의 관리대행기간은 2019년 9월 1일부터 2020년 12월 31일까지로 한다. 다만, 관리대행시설의 준공 및 인수 지연 시에는 관리대행기간은 인수시점으로부터 시작하며, 이 경우 지연된 기간에 대하여 관리대행비는 지급하지 아니한다.	제4조(관리대행기간 및 협약변경) ① 이 협약에 의한 사업의 관리대행기간은 2019년 12월 21일부터 2020년 12월 31일까지로 한다.
제16조(관리대행비 및 부담) ② 본 사업의 2019년 계약금액인 비정산비는 *************(세부내역 별표 2)이며, (이하생략)	제16조(관리대행비 및 부담) ② 본 사업의 2019년 계약금액인 비정산비는 ************(세부내역 별표 2)이며, (이하생략)

향후 계획

❍ ‘19년 관리대행 용역 계약 및 협약 변경 시행

❍ ‘19년 12월 관리대행기간(‘19.12.21.~12.31.) 관리대행비(비정산비) 지급

붙임  1. 용역 협약서(안) 1부

2. 슬러지 건조시설(증설) 관리대행 용역비 산출내역.  끝.