문서번호	시설관리과-32083
결재일자	2019.12.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설운영팀장	시설관리과장
윤혜정	박종일	12/26 천성훈
협 조

설계변경(1차) 및 계약금액 변경 검토 보고

(2019년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

2019. 12.

동부수도사업소

(시설관리과)

2019년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역

설계변경(1차) 및 계약금액 변경 검토 보고

우리 사업소에서 시행중인 「2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역」과 관련하여 하반기 긴급 노후 상수도관 정비에 의한 물량증가 등에 따른 설계변경(1차) 및 차수별 금액 조정 계획 검토 후 보고 드림

※ 관련근거: 본부 누수방지과-7295(2019.07.02.)호

1		용 역 현 황

□ 용 역 명: 2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역

□ 용역개요: 상수도공사에 따른 발생 건설폐기물 운반 및 처리

용역대상	폐기물 운반(㎥)	폐기물 처리(t)
***************	*****	*****
**************
**************
***************
****************
***********

□ 용역기간: 2019. 6. 26. ~ 2020. 6. 30.

□ 계약금액: ************

□ 수 급 자: **************

2		보 고 내 용

□ 설계변경(1차) 시행

❍ 금년 하반기 긴급 노후 상수도관 정비공사 시행에 의한 건설폐기물 운반 및 처리 물량 증가에 따른 설계변경(1차수)

구분		당초	변경	증․감		비고
건설폐기물 운반 (㎥)	****	***	***	**	****
	*****	***	***	**	****
	***	***	***	**	***
	*	*****	*****	**	****
건설폐기물 처리 (t)	****	*****	*****	**	****
	*****	***	*****	**	****
	***	***	***	**	****
	*	*****	*****	**	******
용역비(천원)		******	*******	**	*******

□ 계약금액 변경(증액)

❍ 용역개요

- 당초: 폐기물 운반 2,233㎥, 처리 4,825t

변경: 폐기물 운반 2,851㎥, 처리 6,128t

❍ 용역금액 변경 내역

(단위: 천원)

구분	당초	변경	증․감	비고
총 부기금액	*******	*******	*********
1차 계약금액	******	*******	*********	*** *******
2차 계약금액	******	******

❍ 설계변경(증액) 사유

- 행정2부시장 지시 관련, 금년 하반기 긴급 노후 상수도관 정비공사 시행에 따른 시공 물량 증가로 용역 대상물(폐기물 발생량) 증가

1차수 계약금액 증액분을 반영하여 총 용역금액 증액

❍	본부 누수방지과-7295(2019.07.02.)호와 관련, 2019년 12월까지 한시적으로 도급비가 10% 이상 증액되더라도 재발주 없이 설계변경으로 시행 가능

	관련근거
행정2부시장 방침 제192호(기획예산과-8478)호 문래동 혼탁수 발생 관련 종합개선대책 본부 누수방지과-7295(2019.07.02.)호 「녹에 취약한 노후 상수도관 추가 정비계획」 ▸ “상수도 공사 연간단가 계약에 대하여도 비위사항이 아닌 경우 ’19년 12월까지 한시적으로 도급비 10% 이상 증액되더라도 재발주 없이 설계변경으로 시행” 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 제1항 설계변경으로 인한 계약금액 조정 (계약예규) 공사계약일반조건 제20조 제2항 공사계약일반조건 제6절 「공사설계의 변경」

3		검 토 의 견

□ 설계변경(1차) 시행

❍	2019년 하반기 긴급 노후 상수도관 정비공사 시행에 따라 폐기물 처리 물량 증가가 발생한바, 우리 사업소 자체 설계변경 심의를 통한 타당성 여부 등을 검토하고 심의 결과에 따라 설계변경 시행 및 정산

□ 계약금액 변경(증액)

❍	2019년 하반기 노후 상수도관 추가 정비 시행에 따른 폐기물 처리 물량 증가분을 「2019년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역」에 대하여 계약 물량 및 금액을 증액하여 설계변경 계약 시행

붙임: 설계변경 내역서 1부.  끝.