＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 및 차수별 금액변경 계약의뢰[2019년 영등포구관내 상수도공사(장기계속단가)]

1. 우리사업소에서 시행중인『2019년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)』에 대하여      설계변경(2회) 사전심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경 및 차수별 금액 변경      계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 영등포구관내상수도공사(장기계속단가)

나. 도 급 자 : ㈜개벽 대표 주우형

다. 공사기간 : 2019.04.03.~2020.6.30

라. 변경사유 : 신규공종  및 계약물량 증.감 발생

누수방지과-7295(2019.7.2.) : 녹에 취약한 상수도관 추가 정비계획

마. 설계변경(2회) 및 차수별 계약금액 변경내용

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	662,904,210원	1,352,043,000원	증689,138,790
1차수	464,032,947원	794,043,000원	증330,010,053
2차수	198,871,263원	558,000,000원	증359,128,737

바. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,급.배수공사비,신설공사비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비

소방재난능력의향상으로안정적인재난시스템구축,소방용수실등의설치및관리,                     소방용수시설설치및보수,시설비및부대비,시설비

첨부 : 1) 설계변경시행 방침서 및 심의의결서 각1부.

2) 설계변경내역서 1부.

3) 제비율검증확인서 및 합의서 각1부.  끝

	시설관리과장
주무관	구본천		시설안전팀장	代최경서		시설관리과장	12/26 고신석
협조자
시행	시설관리과-26933	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4600	/전송	02-3146-4639	/	k-9000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)