문서번호	도시철도사업부-13021
결재일자	2019.12.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		동북선1과장	도시철도사업부장
박성준		김용선	12/30 최병훈
협 조
	주무관			박노성
	주무관			박중모

『별내선(8호선연장) 1공구 건설공사』
관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『별내선(8호선연장) 1공구 건설공사』
관급자재 납품기한 연기 검토 보고

『별내선(8호선연장) 1공구 건설공사』에 소요되는 관급자재 납품기한 연기 요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 별내 감 1-19-777호 (´19.12.13., 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 관급자재 납품기한 연기요청)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

○ 위    치 : 강동구 암사역 ~ 암사역사 생태공원 ~ 현대홈타운 앞

○ 규    모 : L=1,184m, 정거장 1개소, 모란차량기지 유치선 7선

○ 공사기간 : ´17.8.23. ~ ´23.8.21. (2차 : ´19.7.1. ~ ´19.12.31.)

○ 도 급 비 : 90,741백만원 (2차 : 11,700백만원)

○ 시 공 사 / 건설사업관리단 : 쌍용건설㈜ / ㈜동해종합기술공사 외 3개사

□ 관급자재 현황

○ 계약 및 사용 현황

구 분	납품요구번호	규격	단위	계약수량	납품량	잔여량	납품기한	비 고
레미콘	12-19-1- 58769-00	25-27-150	㎥	1,064	786	278	´19.12.31.
		25-21-150		553	26	527
		25-18-150		65	30	35
	12-19-1- 69115-01	25-27-150	㎥	2,515	2,033	482
		25-18-150		309	240	69
아스팔트 콘크리트	12-19-1- 60095-00	BB-2,t=30mm 기층용	ton	1,609	1,410.71	198.29

□ 납품기한 연기 내용 및 사유

○ 연기 내용

구 분		단위	수량	납품기한		비고
				당초	변경
레미콘 ******	25-27-150	㎥	1,064	´19.12.31.	´20.06.30.
	25-21-150		553
	25-18-150		65
레미콘 ********** *****	25-27-150	㎥	2,515	´19.12.31.	´20.06.30.
	25-18-150		309
아스팔트 콘크리트	BB-2,t=30mm 기층용	ton	1,609	´19.12.31.	´20.03.31.

○ 연기 사유

별내선(8호선연장) 1공구 건설공사(2차)의 ************관급자재 사용시기 조정으로 납품기한 연기 필요

- *******************************************

********************

- **********************************

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 상기 내용과 같이 공사계획 변경에 따른 원활한 공사추진을 위하여 관급

자재 납품기한을 연기하는 것은 적정하다고 판단됨

□ 조치계획

○ 관급자재(레미콘, 아스팔트콘크리트) 납품기한 연기 의뢰(총무부)

붙  임 : 관급자재(레미콘, 아스팔트콘크리트) 납품기한 연기요청문 1부.  끝.