투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청 (별내선 1공구 건설공사)

우리부에서 시행중인「별내선(8호선연장) 1공구 건설공사」에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 납품기한 연기요청 현황

품명	납품요구번호	규격	단위	계약수량	납품량	잔여량	납품기한		비고
							당초	변경
레미콘	12-19-1- 58769-00	25-27-150	㎥	1,064	786	278	'19.12.31.	'20. 6.30.
		25-21-150		553	26	527
		25-18-150		65	30	35
	12-19-1- 69115-01	25-27-150	㎥	2,515	2,033	482
		25-18-150		309	240	69
아스팔트 콘크리트	12-19-1- 60095-00	BB-2. t=30mm 기층용	ton	1,609	1,410.71	198.29		'20. 3.31.

나. 예산과목 : 광역철도건설(광역교통시설특별회계),광역철도건설사업,별내선(8호선연장)광역철도건설 시설비(401-01)

붙  임 : 1. 납품기한 연기 검토 보고 1부

2. 납품기한 연기 요청문(건설사업관리단) 1부.  끝.

	도시철도사업부장
주무관	박성준		동북선1과장	김용선		도시철도사업부장	12/30 최병훈
협조자	주무관	박중모		주무관	박노성
시행	도시철도사업부-13020	(		)	접수		(		)
우			/	WWW.seoul.go.kr
전화		/전송	02-772-7305	/		/	부분공개(5)