문서번호	설비부-21632
결재일자	2019.12.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
박경철	代곽용길	전결 12/30 임정규
협 조

- 남부도로사업소 청사신축 기계설비공사

관급자재(자동제어) 납품기한 연장 검토 보고

2019. 12.

도시기반시설본부

설비부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 남부도로사업소 청사신축 기계설비공사

관급자재(자동제어) 납품기한 연장 검토 보고

『남부도로사업소 청사신축 기계설비공사』시행 중 책임건설사업관리기술단으로부터 제출된  관급자재(자동제어) 계약기간 연장건에 대하여 검토보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 남부도로사업소 청사신축 기계설비공사

위    치 : 금천구 시흥대로10길 5 외 8필지

공사기간 : 2017.11.17 ~ 2019.12.31.(총차)

2019.01.09.~ 2019.12.31.(2차)

규    모 : 지하1/지상5층 연면적 5,360㎡(업무시설 및 주민편의시설)

○ 기계설비 : 급·배수 및 환기·냉난방, 우수처리시설, 리프트 등 설치공사 각 1식              도시가스 및 정화조시설 공사 각 1식

○ 소방설비 : 옥내·외 소화전 및 스프링클러 설치 등

공 사 비 : 1,558,088천원(총차) 1,551,470천원(2차)

시 공 사 : ㈜대윤기술공영/ ㈜일경엔지니어링/ ㈜로터스엔지니어링

감리용역 : 삼우공간건축사사무소/(주)해안건축

Ⅱ		관 련 근 거

관급자재(자동제어) 납품기한 연장 검토보고(삼우 제19-1230호, ‘19.12.30.)

Ⅲ		계약 및 추진 현황

관급자재(자동제어) 계약현황

계약명	계약금액	납품요구번호	계약업체	납품기한	비고
자동제어	***********	***********	*****	2019/12/31	총액

관급자재(자동제어) 추진현황

○ 2017.12.11. : 관급자재(자동제어 구매) 계약

○ 2018.12.10. : 1차 납품기한 연장(2019.11.12.까지)

○ 2019.11.12. : 2차 납품기한 연장(2019.12.31.까지)

○ 2019.12.10. : 납품(준공)정산 등 설계변경(정산 등)계약 의뢰

-  *****************************************************

**********************************************

Ⅲ		검 토 내 용

납품기한 연장사유

○ 총무부에 의뢰(2019.12.10.)한 설계변경(감액) 처리건의 지연으로 납품기한 도래에 따른 원활한 행정처리를 위해 불가피하게 관급자재에 대한 납기 연장이 필요함

귀책소재 : 도시기반시설본부

지체상금 부과여부 : 미부과

납품기한 연장

계약명	납품요구번호	계약업체	납품기한		비고
			당 초	변 경
자동제어	***********	*****	2019/12/31	2020/01/30	30일 연장

건설사업관리기술자 의견

○ ‘남부도로사업소 청사신축 기계설비공사’ 관급자재 자동제어설비 납품기한 연장요청 내용을 검토한 결과, 조달청 계약변경 지연으로 인하여 불가피하게 납기 도래에 따른 납품기한 연장 후 납품(준공)처리하는 것이 원활한 행정 처리를 위해 적정하다고 판단됨

Ⅳ		조 치 계 획

책임건설사업관리기술자 검토의견이 적정하다고 판단되므로, 계약부서(총무부)에 통보하여 납품기한을 연장 조치하고자 함

붙임 ： 관급자재(자동제어) 납품기한 연장관련 문서(합의서  포함) 1부.  끝.