문서번호	설비부-21650
결재일자	2019.12.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
김현욱	代곽용길	12/30 임정규

『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』

설계변경(정산) 검토 보고

2019. 12.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』

설계변경(정산) 검토 보고

『남부도로사업소 청사 신축 전기공사(총차 및 2차)』설계변경(정산) 사항에 대해 아래와 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

㈜삼우공간 제2019-705-4호(2019.12.30.), 계약금액 조정 요청보고

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』

공사위치 : 서울시 금천구 시흥3동 963-1 외 13필지

***************************************************************.

공사규모 : 지하1층/지상5층(연면적 5,361㎡)

공사내용 : 수전용량 500KVA(업무시설 300KVA, 주민편의시설 200KVA),                  태양광발전장치 50KW, 비상발전기 200KW 설치 등

*************************************

********************

[조 감 도]	[현황 사진]

Ⅲ		검토내용

설계변경(정산) 내용

❍ 전기공사(총차 및 2차) 정산(보험료 및 산업안전보건관리비, ESC 등)

❍ 냉난방기 및 태양광발전시설 민원사항 반영

설계변경(정산) 사유
❍ 전기공사(총차 및 2차) 준공 처리를 위한 보험료 및 산업안전보건관리비        미사용분 정산

❍ 물가변동에 따른 계약금액 정산

❍ 냉난방기 이전 설치에 따른 전기공사 물량 반영

❍ 민원에 따른 태양광 발전시설(모듈) 일부 이전 설치사항 반영

주요 변경(정산) 사항

□ 전기공사(총차)

순번	구 분	공사비(원)			비 고
		당초	변경	증·감
*	*****	***********	***********	***********
*	******	***********	***********	************	********** ********
*	****	***********	***********	************
*	*****	**********	**********	***********
*	**	*************	*************	************
*	***	**********	**********	***********	*****
*	********	*	*********	***********
*	*****	*************	*************	************

□ 전기공사(2차)

순번	구 분	공사비(원)			비 고
		당초	변경	증·감
*	*****	***********	***********	*********
*	******	***********	***********	************	********** ********
*	****	***********	***********	************
*	*****	**********	**********	***********
*	**	*************	*************	************
*	***	**********	**********	***********	*****
*	********	*	*********	*********
*	*****	*************	*************	************

공사계약 변경 사항

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
****	****	************ ************	************ ************	****
	****	************ ************	************ ************	****
****	****	**************	**************	*************
	****	**************	**************	*************

감리단 검토의견

❍ 상기와 같이「남부도로사업소 청사 신축 전기공사」계약금액 변경 요청을 검토한 결과 전기공사 업체에서 요청한 계약금액 조정요청은 적정한 것으로 사료됨.

Ⅳ		검토의견

책임 건설사업관리기술자가 검토하고 ㈜삼우공간건축사사무소에서 제출한 전기공사(총차 및 2차) 설계변경 및  정산 내용이 적합한 것으로 판단되어 총무부에 설계변경(정산) 계약을 의뢰하고자 함.

Ⅴ		향후계획

2019.12.: 전기공사(2차) 설계변경(정산)
2020.01.: 전기공사(2차) 준공검사
2020.01.: 공사준공 및 시설물 인계인수

붙임  감리단 공문 1부.  끝.