“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 빗물마을 조성사업 선정 결과 및 추진 계획 안내

1. 물순환정책과-22276호(2019.12.26.)와 관련입니다.

2. 2020년 빗물마을 조성사업 선정 결과 및 추진 계획을 아래와 같이 안내해드리니 향후 사업추진에 차질이 없도록 적극 협조해 주시기 바랍니다.

○ 빗물마을 선정 차지구 및 예산 지원

(단위: 백만원)

구분	종로구	중구	동대문구	동작구	구로구
설 계 비	50	50	50	50	20
공 사 비	700	700	700	700	370
합 계	750	750	750	750	390

○ 추진일정

추진일정 추진내용	1분기												2분기														3분기										4분기						1분기			2분기
공 정 률	10												25														35										60						70			100
사업대상지 선정 및 예산 배정	재배정
설계용역 발주, 계약, 시행		발주			착수																												완료
주민워크숍 개최 및 의견 수렴														마을당 2회
공사 발주, 계약, 착공 및 준공																																		착공					1차 시행						2차 시행

※ 예산 재배정(1.18 예정) 전 실시설계 사전절차(기술용역타당성 심사) 이행 등 발주 준비 철저

붙임: 빗물마을 조성사업 심의 결과 및 추진 개선 방안 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(도로과),서울특별시중구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),동작구청장(치수과장),구로구청장(도로과장)
주무관	강신욱		물순환정책팀장	이웅희		물순환정책과장	12/30 정훈모
협조자
시행	물순환정책과-22448	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3763	/전송	02-2133-1041	/	riversw@seoul.go.kr	/	부분공개(5)