아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약 변경 의뢰(남대문시장 진입광장 및 지하보도 활용방안 설계용역)

1. 공공재생과-10711(2017.9.28.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 과에서 수행 중인 아래 용역에 대하여 계약 변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 남대문시장 진입광장 및 지하보도 활용방안 설계용역

○ 용역기간 : '17. 4. 21. ~ '17. 9. 30.

○ 계약금액 : 금85,344천원

○ 용 역 사 : 디자인팩토리 구미리 건축사사무소, 지오아키텍처

나. 변경내용 : 용역기간 연장

○ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	'17.04. 21.~'17.07.19.	'17.04. 21.~'17.10.31.	증) 1개월
용 역 비	85,344천원	85,344천원	변경없음

○ 변경사유

- 문화재 현상변경 허가 심의 및 협의 진행중으로 절대공기 부족으로 인한 과업기간 연장

○ 귀책사유 : 서울시 (지체상금 미부과)

붙임 : 1) 방침서 사본 1부.

2) 과업지시서 1부.

3) 설계내역서 1부.

4) 합의각서 1부

5) 예정공정표 1부.  끝.

	공공재생과장
주무관	이석규		서울역재생계획팀장	김장성		공공재생과장	09/29 홍선기
협조자	계약1팀장	조현
시행	공공재생과-10787	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8649	/전송		/	bestsklee1@seoul.go.kr	/	대시민공개