아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	용역 계약사항 변경 알림

1. 공공재생과-11637(2017.10.27.)호와 관련입니다.

2. 「남산 예장자락 재생사업」 추진에 따른 「남산 예장자락 재생사업 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 계약사항이 변경됨을 알려드리며,

3. 아울러, 설계변경범위에 포함되지 않는 과업은 당초 준공기간 내에 설계보완을 완료하여 공사지연 등의 문제가 발생치 않도록 조치하여 주시고, 추가과업도 계약기한내 마무리될 수 있도록 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 계약 변경사항

구분	당초	변경	증·감
용역내용	▶공원‧주차장 설계 등 ▶소방재난본부 리모델링 설계 ▶전문가자문비 (12개월)	‣공원‧주차장 설계 등 ‣소방재난본부 리모델링 설계 ‣전문가자문비(14개월분) ‣발굴유적 보존 등에 따른 설계변경 ‣공사중 교통소통대책 직접경비
용 역 비	1,666,200천원	1,883,340천원	증)217,140천원
용역기간	’16.4.8~’17.10.31	’16.4.8~’18.2.8	증) 100일

나. 계약 변경사유 : 발굴유적 보존 등에 따른 설계변경 추진

붙임 : 방침서 및 합의각석 각 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
주무관	배현경		특화공간조성팀장	안중욱		공공재생과장	10/31 홍선기
협조자
시행	공공재생과-11768	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-8705	/전송	2133-0885	/	xodiddls@seoul.go.kr	/	부분공개(5)