문서번호	하천관리과-19889
결재일자	2017.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	청계천관리팀장	하천관리과장		물순환안전국장
윤희성	代곽민철	代박홍봉		12/27 권기욱
협 조

- 사당역 일대 배수개선대책 -

기본설계 추진 결과 보고

2017.12

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『사당역 일대 배수개선대책 기본설계』 추진 결과 보고

사당역 일대 배수개선대책 기본설계 용역을 시행하고 그 결과 및 조치계획에 대하여 보고드림

용역개요

○ 용 역 명 : 사당역 일대 배수개선대책 기본설계

○ 용역기간 : 2013. 7. 31 ~ 2017. 9. 30

○ 용 역 사 : 동부엔지니어링 외 4개사

○ 용역내용

- 기본계획 배수개선대책(안) 및 유사방안을 검토하여 최적안 도출

ㆍ1안 : 사당천 일부구간 단면확장 + 저류조 + 관거개선

ㆍ2안 : 빗물저류배수시설 + 저류조 + 관거개선

○ 용 역 비 : 1,819백만원

추진경과

○ ‘13.07.31 : 사당역 일대 배수개선대책 기본설계 용역 시행

○ ‘14.11.19 : 강남역ㆍ사당역 일대 배수개선대책 자문회의

- 사당역 일대 배수개선대책은 빗물저류배수시설 추진하되 수치해석 및 수리모형 실험 등을 통한 효과검증

○ ‘15.07.15 : 빗물저류배수시설 도로터널 연계방안 자문회의

- 도로터널과 연계하여 추진하는 방안은 타당하나 사업완료 전 단기대책 필요

○ ‘15.08.19 : 단계별 배수개선대책 수립

- 10년빈도 강우에 대응 가능한 배수개선대책 우선시행(저류조 및 관거개선 등)

- 빗물저류배수시설 설치는 관련사업(도로터널 등)과 연계성을 검토하여 추진

○ ‘17.03.15 : 이수 ~ 과천 복합터널(도로+배수) 민자제안서 접수

○ ‘17.09.30 : 용역준공

용역결과

○ 기본계획 검토 및 빗물저류배수시설 기본설계

빗물저류배수시설(D=6.0m) 종단도

○ 단기대책(저류조 2개소) 실시설계

까치어린이공원 저류조(8,000㎥)	희망어린이공원 저류조(8,000㎥)

조치계획

○ 지역주민의 저류조 설치 반대민원으로 사업추진 불가하므로 자치구 자체 침수저감계획 수립 통보

○ 하천기본계획을 통하여 사당천 병목구간 단면확장 등 검토 시행

(하천관리과-18555, 2017.11.29.)

※ 붙임 : 배수개선대책 위치도 1부.끝.