문서번호	하천관리과-1716
결재일자	2018.1.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	청계천관리팀장	하천관리과장		물순환안전국장
윤희성	민형일	손경철		01/31 한제현
협 조

사당천 단면확장

기본 및 실시설계 용역 발주 계획

2018.1

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	■	□

사당천 단면확장 기본 및 실시설계 추진계획

사당역 일대의 침수피해를 저감시키기 위하여 사당천 일부구간 단면확장(암거신설)을 통해 내수배제 능력을 증대시키고자 함

□ 추진배경

○ 사당동 일대의 30년 빈도 강우(95mm/hr) 대응 배수개선대책으로 「빗물저류배수시설 + 저류조 + 관거개선」계획을 수립하고 10년 빈도 강우(75mm/hr) 대응을 위하여 저류조 설치 및 관거개선 등 단기대책 수립(하천관리과-513076, 2015.8.19.)

○ 그러나 지역주민의 공사반대 집단민원으로 당초 계획한 저류조 설치가 어려운 바, 사당천 단면확장 등을 통한 배수능력 강화 필요(하천관리과-18555, 2017.11.29.)

		단기 대책						중장기 대책
1단계(2013완료)				2단계(시행중)				3단계(2024이후)
3~5년 빈도 56~66mm/hr				10년 빈도 75mm/hr				30년 빈도 95mm/hr
⁃ 저류조 2개소(60,000㎥) (하천관리과)				⁃ 저류조 2개소(당초) → 사당천 단면확장(변경, 금회시행) (하천관리과)				⁃ 빗물저류배수시설(하천관리과) (도로터널등과 연계추진)
				⁃ 이수역, 사당역 일대 관거개선 등 (물재생계획과)

□ 관련근거

○ 대동천(사당천 포함) 등 7개 하천정비기본계획(서울시 고시 제2006-234호)

- 사당천 사당역 ~ 반포천 구간 암거설치(4.0m×5.0m×2련, L=3,100m) 등

○ 사당천 복원 타당성 조사(‘17.9.30)

- 이수 ~ 과천 복합터널 등 설치후에도 사당천 일부구간(이수역~방배펌프장)은 여유고 부족으로 단면확장(약 14.4㎡) 필요 등

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 사당천 단면확장 기본 및 실시설계

○ 용역기간 : 계약일로부터 180일

○ 용 역 비 : 457,050천원

○ 계약방법 : 일반경쟁입찰[사업수행능력평(PQ) 후 가격입찰]

○ 주요 과업내용

- 사당천 일부구간(방배펌프장 ~ 이수역) 단면확장 기본 및 실시설계

․사당천 우안에 2.0m*5.0m 규모의 암거신설 기본 및 실시설계

․주택가 인접시공을 고려한 가시설 검토 및 공사계획 수립

※ 사당천 단면확장 내용을 반영하여 기 타절준공(‘15.2)한 사당천 하천기본계획 보완 및 재수립

□ 발주방법

○ 관련근거

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행자부 예규 제19호 ‘17.12.13)

- 서울시 건설기술용역업자 사업수행능력 세부평가기준(‘17.12.1)

○ 추진방법 : 건설기술용역으로 시행

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

- 사업수행능력평가(PQ) 후 가격 입찰

- 수행능력(35점)+지역업체참여도(3점)+경영상태(2점)+입찰가격(60점)

○ 입찰참가자격

- 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 같은법 시행령 제33조의 규정에 따라 입찰 공고일 현재 건설부문[수자원개발, 상하수도, 토목구조, 토질 및 기초, 교통]에 엔지니어링사업자 신고를 필하고 해당분야별 기술자를 보유한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 상기 분야의 기술사 사무소를 등록한 업체

- 측량분야는 『공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률』제44조에 따라 일반측량업 또는 공공측량업의 등록을 필한 업체

○ 공동도급에 관한 사항

- 혼합방식(공동이행 + 분담이행)으로 참여 가능함

※ 혼합방식으로 참여시 공동이행 참여구성원은 분담이행방식 참여 할 수 없음

- 공동수급체 구성원 수는 대표사를 포함하여 2개사 이상 4개사 이하 참여가능하며, 건설부분 분양는 공동도급(공동이행 방식), 측량분야는 공동도급(분담이행 방식)으로 수행하여야 하며, 측량분야는 사업수행능력평가에서는 제외함

- 공동도급시 대표회사는 참여지분이 많은 업체이어야 함

- 공동이행 방식으로 참여하는 공동수급체 구성원의 계약참여 최소 지분율은 5%이상이어야 함

□ 향후일정

○ ‘18.2 : 사당천 단면확장 기본 및 실시설계 기술용역타당성 심사 및 발주전 심의 의뢰

○ ‘18.2 : 사당천 단면확장 실시설계 발주

○ ‘18년 하반기 : 하천기본계획 및 사당천 단면확장 실시설계 준공

붙  임 : 1. 관련 방침서 1부

2. 과업내용서(안) 및 내역서(안) 각1부

3. 위치도 1부.끝.