문서번호	보행정책과-12096
결재일자	2018.11.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	도로공간재편팀장	보행정책과장		보행친화기획관
전하현	박창수	박태주		전결 11/06 박근수
협 조
	주무관		고영하

『을지로 보행친화 공간재편 사업』

용역준공기한 연기 보고

2018. 11.

도시교통본부

(보행정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『을지로 보행친화 공간재편 사업』

용역준공기한 연기 보고

□ 관련근거

○ 지방자치단체 용역계약 일반조건(행정안전부 예규 제334호, 2010.10.26.)

- 제7절 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지, 제2조 계약기간의 연장

○ 과업내용서

- 준공기한 연기 : 제1장 일반사항 15조(과업내용 변경)관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

************************************

***************************************

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 을지로 보행친화공간재편 기본 및 실시설계 용역

○ 계 약 자 : ㈜태조엔지니어링*******

○ 계약금액 : 금이억육천구십칠만일천칠백원정(￦260,971,700)

○ 계약일자 : 2018년  4월 16일

○ 착수일자 : 2018년  4월 20일

○ 준공기한 : 2018년 11월 19일

□ 과업내용

○ 을지로 보행친화 공간재편 기본 및 실시설계

- 을지로 교통상황 모니터링 및 차로축소, 공간활용방안 설계용역

- 교통안전시설 심의, 디자인심의 등 각종 심의 수행

- 주민설명회, 전문가 자문회의 등 회의 지원

□ 추진현황

○ ’18.4.20.    : 용역착수

○ ’18.5.~8.   : 보고회(전문가, 유관기관 참여) 실시

○ ’18.7.~9.    : 투자심사 수행(조건부 적정************

○ ’18.10.16.   : 사업 추진계획 조정방침 수립

□ 준공기한 연기내용

○ 준공기한

- 당    초 : 2018.11.19.

- 변    경 : 2019. 2.19.(90일 연장)

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유

- 교통영향 분석결과******************도심교통정체 완화 방안 강구 및 교통안전시설 심의 및 도시디자인 심의 등 후속일정 상황 등을 고려한 최적의 설계를 위한 설계기간 연기 필요

□ 예산현황 및 조치계획

○ 예산현황                                         (단위 : 천원)

구분	예산현액	***** *****	*** *****	***** *****	****	비고
시설비	334,000	*******	*******	*******	******

○ 예산조치계획

- 도급비*************************************************************사고이월 조치

□ 향후계획

○ 준공기한 연기의뢰

- 재무과 변경계약 요청

○ 계약상대자(㈜태조엔지니어링)에 통보하여 용역수행에 차질이 없도록 조치

끝.