“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	계약변경 의뢰(사당천 단면확장 기본 및 실시설계)

1. 우리과에서 계약한 「사당천 단면확장 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 사당천 단면확장 기본 및 실시설계 용역

○ 계약업체 : ㈜화신엔지니어링, ㈜동해종합기술공사

나. 변경내용

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
용역비	459,274	459,274	-
과업기간	‘18.5.14. ~ ‘19.2.28	‘18.5.14. ~ ‘19.7.31

○ 변경사유

- 단면확장 추가 검토구간(이수역~방배경찰서) 측량 및 방배경찰서 등 관계기관 협의에 따른 추가기간 소요

붙 임 : 1.방침서 1부.

2.합의각서 1부.

3.준공기한 연기 의뢰서 1부.끝.

	하천관리과장
주무관	윤희성		청계천관리팀장	민형일		하천관리과장	02/27 한유석
협조자	계약1팀장	조현
시행	하천관리과-2807	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)