문서번호	시설과-936
결재일자	2019.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	김정미	진병규	05/10 안수연
협 조

「지방폐교 활용 가족자연체험시설」

시설물 정비 계획

2019. 5

동부공원녹지사업소

(시설과)

「지방폐교 활용 가족자연체험시설」

시설물 정비 계획

지방폐교를 활용한 가족자연체험시설과 관련하여 교육정책과(市)로부터 시설물 정비 협조 요청이 있어 사업 계획을 아래과 같이 수립하여 시행에 만전을 기하고자 함.

□ 사업근거

○ 가족자연체험시설 배수로 정비 협조 요청[교육정책과-7157호(2019.4.22.)]

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 지방폐교 활용 가족자연체험시설 배수로 정비 공사

○ 대 상 지

- 포천 자연마을 서울캠핑장(경기도 포천시 관인면 북원로 371-115)

- 철원 평화마을 서울캠핑장(강원도 철원군 근북면 유곡로 545)

○ 사업기간 : 2019. 5. ～ 6.

○ 사 업 비 : 54백만원

○ 사업내용 : 측구수로

- 포천 : 측구수로(102m), 호박돌 쌓기(62m), 야자매트(70m)

- 철원 : 측구수로(228m), 집수정(1개소)

□ 추진경위

○ 2019. 04.22   : 가족자연체험시설 배수로정비 협조 요청(교육정책과→동부)

○ 2019. 04.25   : 가족자연체험시설 현장 답사(포천, 철원)

○ 2019. 04.29~ : 자체설계 진행

□ 세부 시행계획

○ 실시설계용역 시행 : 자체설계 시행

○ 공 사 시 행

- 계약방법 : 수의계약

- 기    간 : 착수일로부터 25일

- 사    유 : 장마철 전 배수로 정비를 시행하고, 캠핑 성수기 전 공사를 조속히 마무리 하기 위해 전문업체와 신속히 계약을 체결하여 사업 시행에 만전을 기하고자 함

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로하는계약에 관한법률 시행령 제25조 제1항 제5호 2017수의계약 제도 개선계획(재무과-13795호,2017.3.17.):희망기업과의수의계약(여성기업)추정가격 5천만원 이하

□ 향후 추진일정

○ 2019. 05 : 예산 재배정 요청(동부→교육정책과)

○ 2019. 05~06 : 공사 시행 및 준공

○ 2019. 06 : 시설물 인계(동부→교육정책과)

붙임 : 가족자연체험시설 배수로 정비 협조 요청 1부. 끝.