문서번호	청소년정책과-17387
결재일자	2019.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
정한수	박정우	09/27 代정현석

시립금천청소년센터 기능보강 집행잔액 승인 검토보고

2019. 9.

평 생 교 육 국

(청소년정책과)

시립금천청소년센터

기능보강사업 집행잔액 승인 검토보고

시립금천청소년센터 ’19년 기능보강사업 집행잔액 사용승인 요청이 있어 이를 검토하고 보고드림

Ⅰ		예산 집행 현황

□ ’19년 기능보강 예산 현황

○ 예 산 액 : 240,000,000원

연번	사업내용	교부액	집행액	집행잔액
	계	240,000,000	210,265,990	29,734,010
1	체육관 리모델링 공사	240,000,000	210,265,990	29,734,010

○ 집행 잔액 발생 사유

- 조달청 나라장터 공개입찰을 통한 낙찰차액 발생

Ⅱ		집행잔액 사용계획

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 외부 우수관 및 도로 긴급보수 공사

○ 사업기간 : 2019. 10. ~ 12.

○ 소요예산 : 7,800천원

□ 긴급공사 필요성

○ 주차장 진입로 아스팔트 싱크홀 발생으로 인한 지반 침하

- 청소년센터 진입 차량 및 이용시민에 안전을 위해 긴급 보수 필요

□ 검토결과 : 승인

○ 시립금천청소년센터 이용 청소년 및 시민의 안전사고 예방을 위해 필요한

공사로 적정함에 따라 기능보강사업 집행 잔액 사용을 승인하고자 함

※ 현황 사진

싱크홀 구간 임시 안전조치	싱크홀
싱크홀 내부	맨홀 내부 우수관 균열 현황

□ 추진일정

○ 집행잔액 사용승인통보(市 → 센터)             : ’19. 9. 27.

○ 공사시행(센터)                               : ’19. 10~12

○ 정산 및 집행 잔액 반납                      : ’20. 1

붙임 : 기능보강사업 집행 잔액 사용승인 요청 1부. 끝