투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행(정산) 및 계약의뢰-한강 상수원 취수장 정비공사

우리 본부에서 시행중인 『한강 상수원 취수장 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고 계약의뢰 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 한강 상수원 취수장 정비공사

나. 계약기간 : 2019.04.11. ∼ 2020.01.04.

다. 도 급 액 : 788,853,000원

라. 시 공 사 : 유호산업개발 주식회사

마. 감 리 사 : 주식회사 신승엔지니어링

바. 변경내용                                                  (단위:원)

구 분	정산			비고
	당 초	변 경	증·감
도급비	788,853,000	818,853,000	감 30,000,000

사. 설계변경사유

- 상수원 취수장별 준설 물량 조정에 따른 사토물량 증가

- 토목공사 원가계산 제비율(간접비, 보험료 등) 사용정산

아. 예산과목

- 깨끗한물관리, 한강수질개선, 잠실상수원퇴적물준설, 시설비

(증액 30,000천원-기금)

첨부 :  1. 설계변경 시행 방침서 1부.

2. 건설사업관리자 검토 의견서 1부.

3. 변경도서(정산). 1부. 끝.

	치수과장
주무관	김동식		치수과장	11/14 손창열
협조자
시행	치수과-3972	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개