투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 계약 의뢰(강남순환 4공구 전면책임감리용역)

우리 본부에서 시행 중인『강남순환도시고속도로(4공구)건설공사 전면책임감리용역(16차)』에 대하여 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사 전면책임감리용역

나. 용 역 비 : 금10,745,700천 원 (16차: 1,212,700천 원)

다. 용역기간 : ’02. 12. 31.~’20. 6. 30. (16차: ’19. 1. 1.~’19. 12. 31.)

라. 용역업체 : ㈜서영엔지니어링  대표 이재호

마. 설계변경 내역

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증･감	비고
용 역 비	전 체	10,745,700	10,745,700	-
	금회(16차)	1,212,700	1,212,700	-
공사기간	전 체	2002. 12. 31. ~2020. 6. 30.	2002. 12. 31. ~2020. 6. 30.	-
	금회(16차)	2019. 1. 1. ~2019. 12. 31.	2019. 1. 1. ~2020. 1. 31.	증) 1개월

바. 설계변경 사유

- 금하지하차도 기계설비분야 감리원 투입에 따른 용역기간 연장

사. 예산과목

- 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로건설, 시설비및부대비(401), 감리비(02)

붙임  1. 설계변경(16차 4회) 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김구		도시고속도로과장	장수철		토목부장	12/30 김용제
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	토목부-24478	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8664	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	대시민공개