문서번호	설비부-21614
결재일자	2019.12.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박도원		오삼록	12/30 임정규
협조

『남산예장자락 재생 기계설비공사』

물가변동 계약금액 조정(1회) 검토보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생 기계설비공사』

물가변동 계약금액 조정(1회) 검토보고

「남산예장자락 재생 기계설비공사」계약상대자의 물가 변동으로 인한 계약금액 조정 요청에 대하여 검토보고 드림

1		관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조, 동법 시행령 제73조, 동법 시행규칙 제72조

○ 공사계약 일반조건 제22조(물가 변동으로 인한 계약금액의 조정)

○ 계약금액 조정(1회) 검토보고(남산예장 감리 제2019-598호, ‘19.12.26.)

2		공사개요

○ 공 사 명: 남산예장자락 재생 기계설비공사

○ 공사규모: 공원 15,154㎡, 주차장 10,015㎡(버스 39대, 장애인 2대)

○ 용    도: 자동차관련시설(주차장 및 부대시설)

○ 공사기간: 2017. 09. 01. ~ 2020. 12. 31.

○ 공사금액: **************************************

○ 시 공 사: ************

○ 책임건설사업관리단: ㈜동성엔지니어링 외 2개사

(단위: 원)

구분	계약금액	준공금액	공사기간	비고
총차	*************	***********	*********************
1차	***********	***********	*********************	준공
2차	*************	*	*********************	금차

3		검토내용

□  물가변동 충족 조건

○ 계약을 체결한 날부터 90일이상 경과하고 동시에 아래 ②항에 해당되는 때

○	입찰일을 기준으로 하여 산출된 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 경우

□  물가변동 검토내용

○ 계약금액 조정

구분	기준시점		비교시점 (조정기준일)	조정 충족요건	경과일수 (지수증감)	조정율	검토결과	비고
	입찰일	계약일
1회	**********	**********	**********	****** *******	******* **********	**** *****	***

○ 계약금액 조정 세부 검토 내용                          (단위: 원)

구 분		ESC 검토내용		비 고
		검토내용	정산내용
□물가변동 대상공사의 계약금액(A)		*************	*************	도급계약서 사본 참조
□물가변동 제외금액(B)		***********	***********	물가변동 적용대가 집계표 참조
㉮물가변동 조정기준일 (현재공정율)	예정공정율	******	******	예정 및 실행공정표 참조
	실행공정율	******	******	지연 및 실행공정율 내용 반영
	기성수금율	******	******	기성 및 준공검사원 참조
	제외공정율	******	******	공정표 및 내역서상 세부공정율 산정
□물가변동 적용대가(C)		*************	*************	C=A-B
□물가변동 조정율(D)		*****	*****	지수조정율 산출표 참조
□물가변동등락 대상조정금액(E)		**********	**********	E=C×D (천원이하 절사)
□선급금 공제금액(F)		****	****	F=(D×A×E)
가. 선급금 지급일		****	****
나. 선급금 금 액		****	****
다. 선급금 지급비율(G)				G=(선급금액 ÷ 계약금액)×100
□물가변동 조정 적용금액(H)		***********	**********	물가변동 조정 적용금액=(E-F)

계약금액(A)	물가변동 금액	정산으로 인한 조정금액(B)	계약금액 조정 (C=A+B)	비고
*************	**********	**********	*************	*********

□  계약금액 조정 현황                                       (단위: 원)

□  건설사업관리단 검토의견

○ 계약금액 조정요건(계약일 후 90일 이상 경과, 입찰일을 기준일로 지수조정율이 100분의3이상 증감의 경우) 및  물가변동 기초자료가 적합함.

○ 계약상대자가 제출한 물가변동으로 인한 계약금액 조정보고서 검토결과 관련 규정 등 요구조건에 충족되어 계약금액 조정이 타당하다고 판단됨.

4		보고자 의견

○ 건설사업관리기술자가 제출한 「남산예장자락 재생 기계설비공사」의 물가변동으로 인한 계약금액(ESC) 조정 1회에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 승인 통보하고자 하며 향후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임  물가변동 계약금액 조정 검토보고 1부.  끝.