문서번호	시설보수과-6854
결재일자	2019.12.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	시설보수과장
조호영		김준섭	12/31 김준섭
협 조
	주무관			신동헌
	주무관			고흥일
	주무관			이승환
	주무관			이철형

『기아대교(상류교) 외 5개소 정밀안전점검』용역 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12

남부도로사업소

시설보수과

『기아대교(상류교)외 5개소 정밀안전점검』용역 결과보고

『기아대교(상류교)외 5개소 정밀안전점검』용역 완료 결과보고 및 지적사항에 대한 보수 등 향후 조치계획 보고임.

□ 시설물 현황

연번	시설물명	위치	구조 형식	연장 (m)	폭 (m)	준공년도
1	기아대교(상류교) (2종)	금천구 시흥동 672-14	PF, STB	245	12.5	2001
2	관악도림교 (2종)	관악구 신림동 1472-5	SPG	140	10	1971 (1998년 개축)
3	여의교 (2종)	영등포구 여의도동 5-7	PSCI	240	18	1976 (1990년 개축)
4	철산교 (2종)	금천구 가산동 614-72	PSCI	150	10	1977
5	이수교 (법정외)	서초구 방배동 1302	PSCI	48.1	19	2003
6	주암교 (법정외)	서초구 우면동 356	합성라멘	65	20.6	2016

□ 용역개요

❍ 기아대교(상류교)외 5개소 정밀안전점검용역

- 용역기간 : 2019.4.24.~11.19.

- 용 역 사 : (주)한국국토안전연구원 대표 오성균

- 용 역 비 : ************

□ 용역결과

❍ 상태등급 결과

구분	기아대교 (상류교)	관악도림교	여의교	철산교	이수교	주암교
등급	B	B	B	B	B	B

❍ 종합결론

- 기아대교(상류교)(2종)

· 교량의 안전성에 큰 문제가 없는 상태로 평가되었으나 일부 콘크리트 균열 및 철근노출 등이 발생되었으며 지속적인 유지보수를 실시하면 사용성 및 안전성 확보에는 문제가 없을것으로 판단됨.

- 관악도림교(2종)

· 교량의 안전성에 큰 문제가 없는 상태로 평가되었음으나 관악도림교(하류)는 교면포장면에 발생된 단면손상에 대한 대대적인 보수가 필요할 것으로 판단되며, 포장면에 대한 보수 이후 바닥판하면에 연계되는 단면손상에 대한 보수·보강 또한 이루어져야 할 것으로 판단됨.

- 여의교(2종)

· 교량의 안전성에 큰 문제가 없는 상태로 평가되었으나 여의교(상류)의 종조인트부에 설치된 데크플레이트는 종조인트부의 누수에 의한 부식이 확인되었으며,  또한 배수관 접합부에서 우기시 다수의 누수가 발생되고 있어 우선적인 조치가 필요하며, 포장면의 배수구 막힘에 대한 지속적인 유지관리를 통한 청소가 필요할 것으로 판단됨.

- 철산교(2종)

· 철산교(상류)는 일부 바닥판하면의 신축이음부 누수에 의한 상류, 하류 하부구조의 2차 손상이 발생되고 있는 것으로 조사되어 발생된 손상에 대한 지속적인 유지보수를 실시한 후 주기적인 점검을 통해 유지관리를 실시한다면, 본 교량의 공용 중의 문제는 없을 것으로 판단됨.

- 이수교(법정외)

· 교량의 안전성에 큰 문제가 없는 상태로 평가되었으며, 각각의 부재에 발생된 손상에 대한 지속적인 유지보수를 실시한 후 주기적인 점검을 통해 유지관리를 실시한다면, 본 교량의 공용 중의 문제는 없을 것으로 판단됨.

- 주암교(법정외)

· 교량의 안전성에 큰 문제가 없는 상태로 평가되었으며, 각각의 부재에 발생된 손상중 하자보수 기간이 남은 부재는 하자보수를 실시하고 그 외 발생된 손상에 대해서는 우선 순위에 따라 보수를 실시한 후 주기적인 점검을 통해 유지관리를 실시한다면, 본 교량의 공용 중의 문제는 없을 것으로 판단됨.

□ 조치계획

❍ 정밀안전진단 및 정밀안전점검 결과 주요 손상중 보수 1순위에 대해 2020년 단위사업 및 일상유지보수 예산 범위내에서 보수조치

- 2020년 단위사업 예산 현황

*********************

- 하자기간내 시설물(여의교, 주암교) 하자보수 요청

❍ 점검 2순위 및 3순위 손상에 대하여는 향후 지속관찰 및 결함진행 여부를 확인하여 내구성 확보 및 예방적 보수를 실시(일상유지보수)하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 시설물별 개략공사비 각1부.  끝.