문서번호	목동사업과-12387
결재일자	2020.1.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		목동사업과장	체육시설관리사업소장
이승언		이종섭	01/02 김정열
협 조
	운영기획과장			김남대
	주무관			송미자
	주무관			이동열
	주무관			장서윤

<2020 목동운동장 및 신월야구공원>

시설물유지보수공사(연간단가) 발주계획(안)

2019.12.

체육시설관리사업소

(목동사업과)

<2020 목동운동장 및 신월야구공원> 시설물유지보수공사(연간단가) 발주계획(안)

2020년도 목동운동장(주경기장, 야구장, 빙상장) 및 신월야구공원의 노후시설물에 대해 다음과 같이 연간단가계약공사로 조기 발주하여 각종 점검 지적사항에 대한 보수·보강, 환경정비 사업 등을 적시에 추진함으로써 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 조기발주 근거

○ 재무과-51550호(2018.11.08.)

- 대상공사 : 시민들의 안전 및 생활불편과 직결되는 시설물유지관리 연간단가 계약공사 등

- 회계연도 출납폐쇄 기간이 익년 2월에서 당해연도 12월로 변경됨에 따라 성질상 중단할 수 없는 사업인 경우(시설물유지관리공사, 정보화 유지보수 용역 등) 사전절차를 이행하여 조속한 시일내에 계약의뢰 할 것(12월중 예산타당성심사, 계약(원가)심사 등 시행가능)

□ 시설개요

○ 대상시설물 : 목동운동장(주경기장, 야구장, 빙상장), 신월야구공원

○ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2020.12.15.

○ 공사내용

- 정기점검, 정밀점검 및 정밀안전진단 지적사항

ㆍ구조물균열 및 단면보수, 부식도장, 시설물 보수 등

- 환경정비 시설물 유지보수 : 도장 및 포장 정비, 사무실 등 시설환경 개선

- 우기 등 재해관련 보수 : 배수시설, 누수정비 등

- 기타 시설물 유지보수

※ 차수별 작업지시에 따라 상세 공사범위(위치, 수량, 공사기한)는 별도 방침후 시행

□ 예  산

○ 예 산(안) : 600,000천원

○ 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 노후체육시설개보수사업, 목동운동장·신월야구공원 시설개·보수, 시설비 및 부대비(401), 시설비

※ 예산 집행잔액은 긴급사항 등이 있을 경우 추후 방침수립후 집행

□ 입찰방법

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰(지역제한)

○ 참가자격 : 건설산업기본법령의 기준에 의거 시설물유지관리업 등록을 필 한 업체

□ 공사집행 절차

○ 공사발주 및 계약(소장 방침)

- 단가, 내역서, 시방서

- 사업자 선정, 총괄금액, 총공사기간 등

○ 연간단가 차수별 작업 절차

① 차수별 공사 파악(점검 지적사항, 유지관리 담당주무관 검토서 제출)

② 담당주무관 자료수합 및 내역서 작성ㆍ검토

③ 사업소장 및 목동사업과장 검토, 승인(사무전결처리규정에 의거)

④ 차수별 공사비 및 공사기간 통보(연간단가 업체)

⑤ 차수별 정산(기성) 준공 : 정산수량, 정산금액 확정

○ 예산집행 [준공(기성)처리]

□ 집행 실적

(단위 : 천원)

**********************************************************************************************

□ 추진 계획

○ 2019.12월 중 : 설계서 작성, 전문공사발주 사전검토 및 방침수립

○ 2020.01월 중 : 계약심사 의뢰 및 공사발주

○ 2020.02월 중 : 계약 및 공사착공

○ 2020.12.15.   : 공사준공(예정)

□ 처리 의견

○ 목동운동장 및 신월야구공원의 겨울철 시설물 유지관리 공백기간이 최소화 될 수 있도록 12월중 공사계획을 수립하고, 1월초 노무비 단가(’20.01.02.예정)가 결정된 이후 계약심사 의뢰 및 공사계약을 추진하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 설계내역서 1부.  끝.