문서번호	공원녹지정책과-95
결재일자	2020.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장		푸른도시국장
허향미	박미성	하재호		전결 01/03 최윤종
협 조	동부공원녹지사업소장		최현실
	중부공원녹지사업소장		박미애

2020.무장애 친화공원 조성사업 추진계획

푸른도시국

(공원녹지정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 무장애 친화공원 조성사업 추진계획

교통 약자를 포함한 모든 시민들이 편하고 안전하게 공원을 이용할 수 있도록 장애 요소 최소화 및 안전한 환경으로 개선하고자 하는 「무장애 친화공원 조성사업」을 ‘길동생태공원·중랑캠핑숲’에 추진하고자 함

1		사 업 개 요

❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2022년

❍ 사 업 비 : 9,523백만원(기본계획용역: 256, 공사: 9,267)

❍ 사업내용 : 접근성 개선, 편의성 증진, 이용성 도모, 안정성 개선 등

❍ 대 상 지 : 시 직영공원 14개소(시직영공원 25개소 중 11개소 제외)

- 여의도, 보라매, 월드컵(평화,하늘,노을,난지천), 천호, 선유도, 북서울꿈의숲, 남산,서울숲, 길동생태, 중랑캠핑숲, 용산가족, 서서울호수, 간데메, 응봉

※ 11개소 제외: 푸른수목원․경의선 숲길․문화비축기지․서울식물원 – 신규조성,

낙산–산지형, 서울대공원 - 비전수립 추진 중, 시민의숲 - 재조성 중

어린이대공원 - 마스터플랜 수립 중

서울창포원 - 공원 조성계획 수립 용역 완료, 훈련원․독립공원 - 자치구 이관

❍ 연도별 추진실적

(단위: 백만원)

구 분	합 계	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
개 소	9개소	1개소	1개소	기본계획 용역	1개소	2개소
공원명	-	여의도	보라매		월드컵(평화)	월드컵(하늘,노을,난지천), 천호
소요예산	6,810	200	1,195	256	1,100	929(월드컵699,천호230)

구 분	2017년	2018년	2019년
개 소	2개소	1개소	1개소
공원명	선유도, 북서울꿈의숲	서울숲(추진 중)	남산(야외식물원, 장충단, 남산타워)
소요예산	742(선유도341, 북숲401)	1,372	1,016

2		추진배경 및 방향

□ 추진배경

❍ 사회적 약자를 배려하는 시대적 분위기와 장애물이 없는 생활환경(Barrier Free)구축에 대한 필요성 증대

※ Barrier Free: 어린이, 노인, 장애인, 임산부뿐만 아니라 일시적 장애인 등이 개별 시설물, 지역 접근·이용·이동함에 있어 불편을 느끼지 않도록 계획·설계·시공

❍ 대형수목 및 다수 시설물들이 위치하고 평지와 경사가 혼재하는 공원의 특성을 감안, 공원의 장애요소를 최소화하고 이용에 편리하게 정비

□ 추진방향

❍ 무장애 친화공원 기본계획 및 가이드라인, 유니버설 디자인 기준 준용

- 공원 내 모든 시설은 장애인과 비장애인이 함께 이용 가능한 통합시설로 계획

- 통합시설 도입이 한정적인 경우, 교통약자를 위한 안내시설 설치

❍ 장애인, 전문가, 이용객 등 각계각층 다양한 의견 수렴

❍ 교통약자를 위한 편의시설 보완과 공원 노후 위험시설 정비 병행

3		추 진 경 위

❍ ‘10.07.: 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙 제정(무장애 인증기준 마련)

❍ 2012년~2014년: 여의도·보라매 무장애 공원 시범조성

❍ ‘14.01.~‘15.04.: 무장애 친화공원 사전조사 및 기본계획 용역

(연차별 기본계획 및 가이드라인 수립)

❍ ‘15.05.~‘19.12.: 6개소 조성완료, 1개소(서울숲) 조성 중

※ 조성완료(6): 월드컵(평화), 월드컵(노을,하늘,난지천), 천호, 선유도, 북서울꿈의숲, 남산

4		2020년 사업계획

□ 사업개요

❍ 대 상 지: 길동생태공원, 중랑캠핑숲

❍ 사업기간: 2020. 01. ~ 11.

❍ 사 업 비: 1,016백만원(시설비 1010, 시설부대비 5, 사무관리비 1)

❍ 사업내용

구 분	길동생태공원	중랑캠핑숲	비 고
주요시설	방문자센터, 관찰데크, 관찰대, 야외 강의장, 습지, 농촌체험장 등	방문자센터, 연못, 캠핑장, 나들이마당, 청소년수련관, 매점 등
주요 개선사항	▫장애인 및 단체 방문 시 차량 접근성 확대를 위한 차량에서 내릴 장소 설치 ▫휠체어 및 장애인 접근을 위한 진입부 포장개선 ▫생태탐방로 입구부의 급경사 극복을 위한 데크 경사로 설치 ▫음수대 교체 및 단차 제거 ▫시각장애인 및 노약자 이용을 고려한 통합안내시설 도입 및 안내체계 정비 ▫화장실 내부 위생기구 및 설비 추가 등	▫장애인 전용 주차장 유도 안내시설 설치 ▫음수대 교체 및 단차 제거 ▫휴게시설 일부 통합 이용시설로 교체 ▫시각장애인 및 노약자 이용을 고려한 통합안내시설 도입 및 안내체계 정비 ▫경사도가 심한 기존 캠핑장-분수연못 접근로의 경사극복을 위한 우회 산책로 조성 ▫화장실 내부 위생기구 및 설비 추가 등
소요예산	▫558백만원(시설비 555, 시설부대비 및 사무관리비 3)	▫458백만원(시설비 455, 시설부대비 및 사무관리비 3)

※ 실시설계 중 전문가 현장 자문 등을 통해 사업비 범위 내에서 정비내역 추가 및 대상지 발굴 가능

□ 추진일정(안)

❍ ‘19. 01.: 사업 추진계획 수립 및 시달

❍ ‘19. 02.: 사업소별 세부 사업계획 수립, 기술용역 타당성 심의

❍ ‘19. 03.~08.: 실시설계용역 시행, 설계심의

- 전문가 자문회의 등 공사발주 전 사전절차(설계심의, 계약심사 등) 이행

❍ ‘19. 09.~11.: 공사시행

5		행 정 사 항

❍ 계획 시달 및 사업비 재배정: 공원녹지정책과

❍ 실시설계 및 공사시행: 동부·중부공원녹지사업소

- 전문가(장애인 등) 자문, 설계심의 이행, 착공 및 준공 보고

붙 임  1. 기본계획 구성도 각 1부.

2. 무장애 친화공원 주요 정비내용 1부.

3. 무장애 친화공원 조성사례 1부.

4. 설계심의요구서, 공사 착공 및 준공 보고서(서식) 각 1부.  끝.