＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	********************
(경유)
제목	공사기간 연장 요청서에 대한 재회신(연장불가)

1. 귀사에서 공사중인 「서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」와 관련 제출하신 공사기간 연장 요청서(수인제2020-0102-5호, 2020.1.2.)에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 기 공사기간 연장불가 통보한 사항으로 연장불가

○ 관련공문 : 공사기간 연장 요청서에 대한 회신(행정지원과-27552, 2019.12.19.)

나. 기타 : 기요청한 설계변경 관련자료는 즉시 제출하시어 신속한 설계변경검토 및  향후 준공검사가 신속히 이루어 지도록 적극 협조하여 주시기 바라며,

다. 본 공사 지연에 따른 지체상금 등 피해를 최소화 할 수 있도록 공정관리에 적극적으로 대처하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서부수도사업소장
★주무관	방만천		행정관리팀장	엄태현		행정지원과장	01/03 김맹순
협조자
시행	행정지원과-198	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)