문서번호	교육정책과-159
결재일자	2020.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교육환경지원팀장	교육정책과장
권범기	신선이	01/03 박기용

’19년 꾸미고 꿈꾸는

학교화장실 만들기 모니터링 결과

2020. 1.

평생교육국

(교육정책과)

’19년 꾸미고 꿈꾸는

학교화장실 만들기 모니터링 결과

	’15~’19년 학교화장실 만들기 사업을 추진한 학교에 대하여 준공 및 관리 현황을 점검하고, 그 결과를 보고 드림

□ 모니터링 개요

❍ 추진근거 : 교육경비 보조에 관한 조례 제9조(교육지원사업의 평가·관리)

❍ 기    간 : 1차 (’19.7.1.~7.12.), 2차 (’19.12.3.~12.13.)

❍ 대    상 : 21개교 (1차 13교, 2차 8교)

❍ 점검요원 : 함께꿈 학부모단(13명)

❍ 점검방법 : 해당 학교 방문하여 점검표에 의한 모니터링 실시

❍ 점검사항 : 기능충족 여부, 유지보수 및 관리상태 등

- 화장실 기능 충족 여부 : 양변기·화변기 비율, 장애인 화장실 설치 등

- 부대시설 설치 여부 : 조명·환기 시설, 폐위생품 설치함 등

- 화장실 유지보수 및 관리상태 : 파손 여부, 청결 상태 등

- 기  타 : 학생·교사 만족도 및 화장실 이용 교육 실시 여부 등

□ 모니터링 결과

❍ 총  평

- 화장실 개선 과정에 디자인 TF팀 의견이 반영되어 이용자 편의를 고려한 감성공간으로 조성되었으며, 생리적 기능 해결을 넘어서 휴게 공간으로서의 역할도 일부 수행하고 있음. 전반적 만족도 높음

- 화장실 기본 시설 및 부대 시설 잘 갖추어져 있으나 일부 학교에서 공간 부족으로 장애인 화장실 구비를 못한 곳도 있음(본관동 설치 등)

- 화장실 청소 관리 상태는 대체로 양호했으며, 위생 또는 기타 사유로 타올 등을 비치하지 않은 학교도 많이 있었음

❍ 주요 점검 내역

- 1차 점검 : ’15~’16년 개선된 학교 대상 표본 점검

점검사항	모니터링 결과
시설부분	개선된지 2~3년 지났지만 시설 상태는 전반적으로 양호. 문고리 고장 등 드물지만 수리를 요하는 경우도 있음
관리부분	화장실 변기, 세면대, 바닥 등 청결상태를 유지하고 있으며 청소도 잘 되어 있음

- 2차 점검 : ’19년 개선된 학교 대상 8개교 표본 점검

점검사항	모니터링 결과
화장실 기능충족	양변기 및 화변기 비율 적정, 장애인 화장실 설치, 칸막이 바닥 등 마감처리 양호
부대시설	음향, 조명, 환기시설 정상 작동. 폐위생품 수거함 등 부대시설 구비
학생 의견반영 및 만족도 등	TF팀 구성하여 학생의견 반영 및 이용자 편의를 고려한 감성적 공간 조성. 전반적 만족도 높음
관리부분	관리상태 양호하나 화장실 이용에 대한 주기적 교육 필요

❍ 개선 필요사항

- 화장실 유지보수 및 관리상태 양호하나 부대시설 등 고장 시 좀 더 신속하고 적극적인 조치와 더불어 화장실 사용에 대한 지속적 교육 필요

- 초등학교의 경우 자동센서용 용변기 및 옷걸이가 성인용 기준으로 설치된 곳이 있어 아이들의 사용을 고려한 새심한 자재 선택 및 설계가 필요

□ 향후계획

❍ 시-교육청 실무자 간담회(모니터링 개선필요사항 등 논의)	: ‘20. 1.10.限

❍ ’20년 사업계획 수립	: ’20. 1.15.限