문서번호	도로관리과-20559
결재일자	2020.1.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장조사평가팀장	도로관리과장
윤진성		백종은	01/06 김진효
협조
	주무관		이창민

2020년 도로하부 공동 자체 탐사 계획

2019. 12.

안전총괄실

(도로관리과)

2020년 도로하부 공동 자체 탐사 계획

서울시 자체 장비 및 기술 인력을 활용하여 위험 구간에 대한 공동(空洞)탐사를 실시하여 지반침하 및 도로함몰을 선제적 예방하고자 함

Ⅰ		조사개요

□ 근   거

○ 동공탐사 연차별 추진계획 검토 보고(행정2부시장 방침 제224호. ‘17.09.26.)

○ 2020년 도로함몰 예방사업 추진 계획(도로관리과-17029호. ‘19.10.25.)

□ 기   간 : ’20. 1. ~ ’20. 12.

□ 현   황

○ 운용인력 : 총 3명(조사·분석2, 운전1)

○ 탐사장비 : 차량형 GPR(800MHz, 24채널), 휴대용 시추기 및 영상촬영기

- GPR을 이용하여 도로하부 공동 위치 및 크기 조사

※ GPR(Ground Penetrating Radar) : 지표투과레이더

	2019년 도로하부 공동 자체 탐사 결과
- 조사기간 : ’19. 1. ~ ’19. 12. - 조사대상 : 수요조사구간(자치구 관리도로) 및 요청구간(사업소, 자치구, 민원구간 등) · 관련기관 요청 시 사전검토 후 조사 수행여부 결정 및 협의 · 민간용역 구간과 중복성 사전 검토 후 조사수행 - 조사결과 : 조사연장 275㎞, 발견동공 81개(소규모 23개 미포함) · 수요조사구간(자치구 관리도로) : 216km(11개구 136개 노선) · 요청구간(사업소, 자치구, 민원구간 등) : 59km(13건 28개 노선) - 결과조치 : 관리 및 요청기관에 결과 통보 · 관리기관(자치구) 복구 후 결과보고 요청

Ⅱ		추진계획

□ 조사대상

○ 수요조사 구간(자치구 관리도로)

- 도로함몰 예방을 위한 자치구 탐사요청구간

- 사전답사 후 담당기관과 탐사수행 일정 및 조사구간 협의

○ 요청구간(사업소, 자치구, 민원구간 등)

- 관련기관 요청 시 사전검토 후 조사 수행여부 결정 및 협의

○ 관리구간(필요시 수행)

- 기탐사노선 중 신속복구(유동성채움재에 의한 복구) 된 구간

□ 운용방안

○ 수행절차

계획 수립 · 조사구간 선정 및 계획 수립 · 자료(지장물도 등) 검토	▶	현장조사 실시 · 공동탐사 수행 · 분석 및 필요시 천공 수행	▶	결과통보 및 관리 · 관련부서에 결과통보 · 보고서작성 및 자료관리

구분	고려사항
계획수립	· 조사일정 계획수립 시 수요조사구간은 접수순, 요청구간은 협의 후 시행 - 수요조사구간 : 성동, 송파, 중랑, 서대문 순 - 요청구간 : 접수 시 일정 및 조사여부 협의(영등포구 ‘20.1~2월 수행예정) · 도로환경(도로폭, 통행량 등)을 고려한 일일 탐사연장 적용 - 도로 폭 좁고 보행자 통행량 많은 도로 : 5㎞/일 - 도로 폭 5m 이상의 1차로인 도로 : 3㎞/일 - 일반 도로 : 10㎞/일 · 탐사구간 현황 파악을 위한 사전 조사 - 지장물도, 구간 현황 등 - 조사 방해요소(주․정차차량, 가시설 등) → 관리기관 처리 요청 - 공동탐사차량 운행이 어려운 경우 관리기관과 조사수행여부 협의
현장조사	· 탐사구간 특성을 고려한 조사 - 도로 폭이 넓은 경우 : 3회 이상 반복 조사 - 방해요소가 많은 경우 : 핸드형 GPR 조사 - 탐사연장이 짧은 경우 : 주변 지역 포함 조사 - 보행자 통행량 많은 경우 : 야간조사
결과통보 및 관리	· 조사 완료 후 1개월 이내 관련부서에 결과 통보 - 서울시 공동관리 기준에 따른 조치방법 안내 - 사후 조치결과 요청 및 확인

○ 자료취득 및 분석 : 직접수행

구 분	조사인원 및 사용장비
장비	차량형 GPR (조사대상에 따라 핸드형 GPR 운용)	휴대용 시추기 및 영상촬영기 (민간용역 위탁 및 필요시 직접 수행)
조사‧분석	윤진성, 이창민
운전	최윤웅

※ 보도, 생활도로(일부), 공사장 부근 등 같이 탐사차량 진입이 어려운 구간은 핸드형 GPR 사용

○ 천공 및 영상촬영 : 민간용역, 추가 필요 시 자체 수행

- 분석속도 향상을 위하여 천공 및 영상촬영 수행(100개소)

· 사업기간 : ‘20. 2.~’20.11.(소요예산 : 금80,000,000원)

- 현장여건(용역 계약 전․후)에 따라 필요시 직접 수행

□ 추진일정

○ ’20. 1.~ 9. : 조사 확정구간(수요조사 및 요청구간 5개구 113개 노선)

○ ’20.10.~11. : 기타 조사구간(위례신도시 신설도로 등)

○ 요청구간은 요청기관과 일정협의 후 수행 여부 및 시기 결정

○ 천공 및 영상촬영 : 용역 계약 후 조사 현황에 따라 탄력적 수행

구 분		2020년 월별 수행일정
		1		2	3			4		5		6		7		8		9	10		11	12
계획수립 및 장비점검
조사 확정 구간 (230㎞)	영등포구
	성동구
	송파구
	중랑구
	서대문구
기타(시도 신설구간 등)
요청구간		- 사업소 및 자치구 등 요청시 조사·분석 탄력적 운영
공동확인 (천공 및 영상촬영)
				계약																	준공
		- 효율적인 업무 수행을 위해 천공 및 영상촬영 민간용역 수행
탐사장비 검교정

Ⅲ		조치사항 및 향후계획

□ 사전조치

○ 세부 조사계획, 점검사항 및 자료파악

- 조사구간의 민간용역 중복여부, 지장물 및 사고이력 등 파악

○ 조사 전 사전답사를 통한 현황파악

- 조사수행 가능여부 및 주의사항 파악 후 관리기관과 협의

- 관리기관 협조 후 조사수행(주․정차 차량 이동 및 교통통제 등)

□ 결과조치

○ 탐사 완료 후 관리기관에 결과 보고(공동 유무 및 크기 등)

- 결과통보 후 공동복구일정 파악 및 복구결과 확인

○ 함몰 등 안전사고 우려가 있는 경우 즉시 관리기관에 조치통보(후 보고)

- 서울시 공동관리등급 중 긴급공동 발견시 관리기관에 즉시 조치통보

○ 시설물 보수, 굴착복구, 추가 조사 등이 예정된 경우 천공을 통한 공동유무 확인절차는 상황에 따라 탄력적으로 운영

□ 활용계획

○ 선제적인 공동탐사로 지반침하 및 도로함몰 사전 예방

○ 공동탐사 기술개발을 위한 기초자료로 활용

- 공동신호형태 및 신호오류 분석에 의해 탐사정밀도 향상 근거자료로 활용

- 공동탐사 분석기술 향상을 위한 D/B 구축

⇨ 지속적인 공동자동분석 프로그램 학습 수행

붙임 : 2020년 공동 자체 탐사 조사구간.  끝.