문서번호	수상안전과-67
결재일자	2020.1.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	운영부장		한강사업본부장
최윤정	김상금	송영민		01/06 정수용
협 조	총무과장		이상이
	기획예산과장		문영일

「2020년 한강아라호」정기검사의

추진기 검사를 위한 수리(부품교체) 계획

2020. 1.

한강사업본부

(수상안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「2020년 한강아라호 정기검사」의

추진기 검사를 위한 수리(부품교체) 계획

한강아라호의 선박안전법 정기검사의 검사기준일에 따라 검사항목인 추진기 수리 및 검사 계획을 수립하여 안전에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

추진근거

○ 선박안전법 제8조(정기검사)

○ 수상안전과-35(2020.1.3.)호 ‣ 2020년 관공선 운영·관리 계획

추진대상

선명	선체규모(m) (길이, 폭, 깊이)	톤수	속도	승선정원	건조일
한강아라호	55.5 x 12 x 2.5	688톤	10노트	310명	’10.10.20.

○ 운영자 : ㈜이랜드크루즈 (대부기간:2019.6.1.~2020.5.31.)

추진사유

○ 선박안전법에 따른 정기검사 기준일(2020.11.18.) 및 임대업체

㈜이랜드크루즈의 운영일정을 고려하고,

○ 입거(상가)검사 장소인 인천조선소 항해를 위한 한강갑문 통과 시

조석 간만차를 고려하여 검사 및 수리는 10월 예정이며,

○ 정기검사 중 추진기 개방검사를 위한 부품 납기는 발주 후 약 26주가

소요되기에 추진기 수리(부품교체) 계약은 2월에 진행하고자 함

※ 2016~2020년 선박안전검사 진행 사항

○ 검사기관 : 한국선급(KR)

○ 2016.6.1부터 한강아라호는 직영이 아닌 임대 운영함으로써 임대업체의

운영일정 등을 고려하여 수리 및 검사를 실시함

년도	검사종류	검사 기준일	수리 및 검사완료일	비고
2015	정기검사	2015.11.18	2015.11.18. ∼ 12.13.	입거(상가)검사
2016	중간검사	2016.11.18.(전후3개월)	2017. 2. 1. ∼ 2.28.	수중검사
2017	중간검사	2017.11.18.(전후3개월)	2018. 2.14. ∼ 3.10.	수중검사(계선)
2018	중간검사	2018.11.18.(전후3개월)	2019. 3.22. ∼ 4.23.	입거(상가)검사
2019	중간검사	2019.11.18.(전후3개월)	2020.2.5. 예정	수중검사
2020	정기검사	2020.11.18.	2020.10.19. 예정	입거(상가)검사

Ⅱ		추 진 계 획

□ 검사개요

○ 근       거 : 선박안전법 제8조(정기검사)

○ 검사기준일 : 2020.11.18.까지

○ 검 사 기 관 : 한국선급(KR) 인천지부

○ 검 사 장 소 : 인천조선소

○ 검 사 기 간 : 2020.10.19. ~ 11.12.(25일간)

○ 검 사 방 법 : 입거(상가)검사

- 선체검사는 상가하여 수리 후 수검

- 기관검사는 주기관, 발전기 수리 및 추진기 개방 후 수검

□ 추진사항

○ 작업내용

- 추진기 및 축 개방검사를 위한 분해 점검 및 수리, 부품 교환

- 추진기 : Marine Jet Power(CSU MJP650DD) x 2대

○ 작업범위

- 추진기 주축 발출 수검 준비

- 허브 분해 쓰러스트 베어링 교환 및 수검 준비

- 중간축 베어링 캡 개방 수검 준비

- 임펠러 교환 및 수검 준비

○ 수리 및 부품교환

- 윤활유, 유압유, 필터 교환 및 유압 실린더 분해, 씰 교환

- 버켙 및 스티어링 작동기 씰 교환

- 선미 유압유 고무호스, 조타실 백업버튼 전구 교환

- 축 립씰, 임펠러, 아연판, 베터리 등 교환

- 축 발출과 허브분해에 따른 교환품 등

- 기관실 조타실 스티어링 및 타각지시기 교환

□ 업체 선정

○ 계약업체 : **********************************

○ 계약방법 : 1인 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항4호타목

- 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는

경우로서 해당 물품 등을 제조ㆍ공급한 자 외의 자로부터 제조ㆍ공급을

받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우

- 추진기는 MJP(Marine Jet Power, 스웨덴)제품으로써 한국대리점         ㈜마린제트파워코리아(MJP)에서만 정품 구매 및 개방 수리가 가능

○ 소요예산 : 321,000천원(부가세 별도)

□ 추진일정

○ ’20. 01. 05. ~ 02. 10. : 일상감사 및 계약심사

○ ’20. 02. 10. ~ 02. 25. : 1인 수의계약 및 발주

○ ’20. 09. 15. ~ 09. 30. : 부품 납기 확인

○ ’20. 10. 19. ~ 11. 12. : 추진기 수리(부품교체) 및 개방 검사

□ 행정사항

○ 일상감사(수의계약)       : 감사위원회(안전감사담당관)

○ 계약심사, 계약 체결      : 계약심사과, 총무과

○ 선박안전검사(추진기검사) : 한국선급(KR)

Ⅲ		소 요 예 산

□ 예 산 액 : 금321,000천원(부가세 별도)

○ 한강공원 등 운영 및 관리, 시설비(100-401-01)

구 분	소 요 예 산	산 출 내 역
계	321,000천원
개방 및 점검 작업	256,000천원	○ 추진기 주축 발출 38,000천원 ○ 허브분해 쓰러스트베어링 분해 64,000천원 ○ 주축 베어링 캡 개방 점검 1,000천원 ○ 임펠러 교환 점검 153,000천원
수리 및 부품교체	65,000천원	○ 기타 수리 및 부품교체 52,000천원 (호스, 필터, 씰, 타각지시기, 아연판 등) ○ 기타 기술자 경비 13,000천원

붙임  견적서, 한국대리점 협약서 각 1부.  끝.