문서번호	서울특별시차량정비센터-167
결재일자	2020.1.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	소장
김전연		김명국	01/06 신용휴
협조

2020년 차량정비센터 내진보강공사 추진 계획(수정)

2020. 1

2020년 차량정비센터 내진보강공사 추진 계획(수정)

차량정비센터에 대한 내진성능 평가결과 내진 B등급(보수)으로 평가됨에 따라 2019년 내진보강공사를 일부 시행하고, 미시행한 시설물에 대한 내진보강공사를 실시하여 안전성 강화에 만전을 기하고자 함.

1		목표 및 추진근거

○ 목   표 : 공공청사 “내진 A등급” 성능확보

○ 추진근거

- 지진 ․ 화산재해대책법 제16조(기존 건축물의 내진보강 추진 등)

- 서울시 지진방재 종합계획(시장방침 제163호(‘16.6.15)

□ 목  표 : “지진에 강한 서울 만들기”

□ 공공시설물별 내진평가 시행 후 건축물 단계적(‘16~’20)보강 추진

- 2020년 차량정비센터 내진보강공사[차량정비센터-13555(2019.11.14.)]

2		추진경위

○ 내진성능평가 시행 : 2017.8 ~ 2017.10

○ 건출물 평가결과 : B등급(붕괴방지 수준)

- 본관 : 벽체 균열 및 바닥 방수층 파손

- 기관반, 하체반 : 조적벽체, 파라펫, 기둥 수직 및 수평균열

- 변전소 : 기둥, 벽체 접합부 수직 및 수평균열

- 경비실 : 파라펫 수평 균열

- 대형정비동 : 조적벽체 수직 및 수평 균열

- 유류창고 : 파라펫 수직 및 수평 균열

- 간이정비공장 : 파라펫 수직 및 수평 균열

- 도장공장 : 파라펫 수평 및 조적벽체 수평 균열

3		사업추진 실적

○ 보강공법선정 : 벽식형 강제이력댐퍼(2019.5.29.)

○ 2019년 내진보강공사 실시 현황

대상	예산(백만원)	사업기간	보강내역
본관, 변전소, 대형정비동	500 시설비 : 465 설계비 : 20 감리비 : 15	2019.5.29. ~ 11.27 공법선정 : 5.29 실시설계 : 6.11~7.29 기술감리선정 : 7.29~7.31 내진보강공사 ; 8.26~11.27	댐퍼 12개 설치 (건물별 4개)

4		사업추진 계획

○ 사업개요

시설명		시설규모	시설 안전 등급	준공년도
서울시차량 정비센터	유류창고	연면적 141㎡, 지상1층	B	1995. 3. 9.
	간이정비고(임대) (한미,광림,미량)	연면적 411㎡, 지상2층
	기관반 정비고	연면적 214㎡, 지상2층
	하체반 정비고 107동	연면적 317㎡, 지상2층
	하체반 정비고 108동	연면적 323㎡, 지상2층
	차량검사소	연면적 491㎡, 지상2층

- 대    상

- 사 업 명 : 차량정비센터 내진보강공사

-  대    상 : 유류창고 및 기관반 정비동(5개 동)

-  사업기간 : 2020. 2 ~ 2020. 9

-  사 업 비 : 810백만원(시설비 720백만원, 감리비 50백만원,

실시설계비 40백만원)

-  사업내용 : 건물 5개동 내진보강공사 및 석면제거 등 청사 정비(수리)

5		추진 일정

○ 내진보강공사 실시설계 용역 시행

-  실시설계용역 타당성 기술심사 : 2020. 2.

-  실시설계용역 업체 선정 : 2020. 3.

-  실시설계용역 결과 보고 : 2020. 3.

○ 감리용역 시행

-  감리용역 기술 타당성 의뢰 및 심사(2020. 4.)

-  감리용역 업체 선정 : 2020. 4.

○ 내진보강 공법 : 벽식형 강제이력댐퍼

○ 공사 발주계획

-  입찰방법 : 일반경쟁입찰(2020. 4.)

-  공사기간 : 착공일로부터 90일

-  입찰참가자격

□ 건설산업기본법 제9조 규정에 의한 “시설물관리유지업” 등록을 필한

업체로 조달청 입찰참가자격이 등록된 업체

○  예산과목

- 차량정비센터, 특화된정비체계 구축, 요율적인 차량정비, 차량정비센터         시설 유지보수, 시설비(401-01)