투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰

우리 부에서 시행 중인 “서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역” 에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역

나. 위    치 : 영등포구 양평동(목동교) ~ 금천구 독산동(금천교)

다. 용역규모

- 일반도로화 : 연장 8.1km, 폭 15.0m

- 친환경공간 조성 : 친환경적인 도로공간 조성(119,000㎡)

라. 계 약 자 : ㈜유신외 4개사

마. 계약변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비 고
계약금액	1,500,000,000원	1,500,000,000원	*	변경없음
계약기간 (1차분)	************ ***************	************ **************	*****	기간연장
총차	**************************** (변경없음)

바. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 계약자 귀책사유 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 실시설계용역의 관계기관 협의 지연, 노선 자문 지연 등으로 인해 1차 계약 공정이 완료되지 않아(80%) 1차분 준공기한을 연기하고자 함

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 용역계약서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김종혁		토목설계과장	代윤창렬		토목부장	01/07 김용제
협조자
시행	토목부-498	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2591	/전송	02-3708-2599	/	mindle93@seoul.go.kr	/	부분공개(6)